다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	장기 미개통 버스정보안내단말기 개통 요청

1. 서울시 대중교통발전을 위한 귀 기관의 노고에 감사드립니다.

2. 가로변정류소 개선사업에 의하여 설치된 버스정보안내단말기의 개통지연으로 시민불편이 초래되고 있으며, 이에 따른 조속 개통을 요청하는 민원이 다수 제기되고 있어,

3. 아래의 장기 미개통 버스정보안내단말기 설치 82개소 정류소에 대한 조속한 전기수전 방안 및 추진일정을‘14.4.28.(월)까지 회신하여 주시고,‘14.5.16(금)까지 개통하여 대중교통이용시민의 편의가 제고 될 수 있도록하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 -

가. 2013년 설치 BIT 미개통 22개소 현황

연번	자치구	ID	정류소명	최종설치	설치	지연개월	사유
1	성동구	04-223	뚝섬서울숲	3단6열단면	2013-12-10	4개월	장거리 굴찰불가
2	성북구	08-327	성북우체국.현대백화점	3단6열단면	2013-09-26	7개월	장거리 굴찰 및 대리석(보도)
3	노원구	11-140	공릉중학교 입구	3단6열단면	2013-10-11	6개월	수전점 없음
4	노원구	11-184	대림아파트	4단6열단면	2013-11-01	5개월	공사불가(사유지, 아파트 협의)
5	노원구	11-438	노원경찰서	3단6열단면	2013-11-12	5개월	아스콘구간 굴착 필요
6	노원구	11-439	동천학교	3단6열단면	2013-11-12	5개월	공사불가(사유지, 아파트 협의)
7	강동구	25-172	광문고등학교	3단6열단면	2013-11-01	5개월	수전점 없음
8	강동구	25-174	고덕아이파크아파트	3단6열단면	2013-11-01	5개월	수전점 없음
9	용산구	03-155	한강중학교	3단6열단면	2013-10-11	6개월	관로굴착거리 160M
10	용산구	03-252	전자상가관광터미널	3단6열단면	2013-10-11	6개월	관로굴착거리 150M
11	용산구	03-259	용산공고	3단6열단면	2013-10-11	6개월	관로굴착거리 130M
12	용산구	03-264	이촌역	3단6열단면	2013-10-11	6개월	관로굴착거리 150M
13	용산구	03-301	현대자동차써비스	3단6열단면	2013-12-23	4개월	자치구허가불가(재심의)
14	양천구	15-183	목동13단지	3단6열단면	2013-09-12	7개월	관로굴착거리 200M
15	양천구	15-209	양천구청역	3단6열단면	2013-09-15	7개월	가로등분전반 사용 구청 협의
16	강서구	16-170	개화검문소	3단12열단면	2013-10-10	6개월	가로등분전반 사용 구청 협의
17	강서구	16-220	등촌3동그랜드백화점	3단6열단면	2013-10-10	6개월	한전지중맨홀 포화
18	강서구	16-222	서울호서전문학교	3단6열단면	2013-11-04	5개월	관로굴착거리 150M, 도로횡단
19	강서구	16-237	가양도시개발5단지	3단6열단면	2013-10-10	6개월	공사불가(사유지, 아파트 협의)
20	강서구	16-240	가양초등학교	3단6열단면	2013-10-10	6개월	자치구 허가 불가
21	강서구	16-280	방화도시개발2단지	3단6열단면	2013-10-10	6개월	관로굴착거리 150M
22	구로구	17-155	구로역	3단6열단면	2013-10-17	6개월	관로굴착거리 150M

나. 2014년 1, 2월 설치 BIT 미개통 현황

연번	자치구	ID	정류소명	설치일	연번	자치구	ID	정류소명	설치일
1	광진구	05-114	중곡동성당앞	2014-01-28	31	성동구	04-243	경동초등학교입구	2014-02-06
2	광진구	05-116	중곡동종점	2014-01-28	32	성동구	04-275	극동아파트	2014-02-06
3	광진구	05-121	면곡시장	2014-01-28	33	은평구	12-128	서부병원	2014-02-10
4	광진구	05-136	대원고교앞	2014-01-28	34	마포구	14-104	월드컵경기장남측,월드컵공원	2014-02-10
5	광진구	05-142	구의사거리	2014-01-28	35	마포구	14-195	마포구청역	2014-02-10
6	광진구	05-145	광진경찰서	2014-01-28	36	마포구	14-196	성서중학교,(구)마포구청	2014-02-10
7	광진구	05-147	광진경찰서	2014-01-28	37	마포구	14-198	성산2교	2014-02-10
8	광진구	05-185	국민은행자양지점앞	2014-01-28	38	마포구	14-200	광흥창역,서강동주민센터	2014-02-10
9	광진구	05-187	자양아파트의료인국가시험원앞	2014-01-28	39	마포구	14-203	신촌연세병원	2014-02-10
10	광진구	05-189	신자초등학교앞	2014-01-28	40	마포구	14-248	기업은행,서교동지점	2014-02-10
11	광진구	05-193	자양아파트의료인국가시험원앞	2014-01-28	41	마포구	14-251	성산시장입구	2014-02-10
12	동대문구	06-133	한천로쌍용아파트앞	2014-02-03	42	마포구	14-295	월드컵파크4단지후문	2014-02-10
13	동대문구	06-136	동일스위트리버아파트앞	2014-02-03	43	용산구	03-185	전쟁기념관	2014-02-11
14	동대문구	06-208	전농사거리	2014-02-03	44	강서구	16-254	블루라인비지니스센타	2014-02-11
15	동대문구	06-210	배봉초등학교앞	2014-02-03	45	구로구	17-832	우성아파트	2014-02-11
16	동대문구	06-231	촬영소사거리세양청마루아파트앞	2014-02-03	46	영등포구	19-214	한신아파트	2014-02-11
17	동대문구	06-321	우산빌딩앞	2014-02-03	47	영등포구	19-280	국회의사당	2014-02-11
18	동대문구	06-422	휘경동신성아파트	2014-02-03	48	영등포구	19-132	국회의사당역,국민은행	2014-02-12
19	동대문구	06-167	경동시장앞	2014-02-04	49	동작구	20-159	상도터널상도동	2014-02-12
20	동대문구	06-214	장안교앞	2014-02-04	50	동작구	20-177	사당중학교	2014-02-12
21	동대문구	06-237	장안동근린공원	2014-02-04	51	서초구	22-118	서초동우성2차아파트	2014-02-12
22	송파구	24-228	신구블레스밸리	2014-02-04	52	서초구	22-120	구립서초어린이도서관	2014-02-12
23	강동구	25-180	한영중고(한영외고)	2014-02-04	53	서초구	22-164	삼호아파트	2014-02-12
24	노원구	11-131	두산힐스빌아파트	2014-02-05	54	서초구	22-165	진흥아파트	2014-02-12
25	노원구	11-225	흥안운수종점	2014-02-05	55	성동구	04-162	옥수동삼성아파트	2014-02-18
26	노원구	11-313	한진한화그랑빌아파트	2014-02-05	56	광진구	05-143	건대앞	2014-02-18
27	노원구	11-314	한천초등학교	2014-02-05	57	광진구	05-168	광나루역극동아파트앞	2014-02-18
28	강남구	23-220	중대부고	2014-02-05	58	광진구	05-203	뚝도변전소앞	2014-02-18
29	강남구	23-436	우성아파트	2014-02-05	59	노원구	11-338	인덕대앞	2014-02-18
30	성동구	04-104	왕십리교회	2014-02-06	60	광진구	05-133	중곡역	2014-02-28

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울시버스운송사업조합,(주)케이티
주무관	이철주		가로변정류소개선팀장	김송		버스정책과장	04/22 신종우
협조자
시행	버스정책과-7610	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-2297	/전송	02-2133-1049	/		/	대시민공개