투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	토목부장
(경유)
제목	One-PMIS 공사기간 변경처리 알림

1. 토목부-7241호(2014.4.16.)와 관련입니다.

2. 강남순환도시고속도로 민간투자시설사업 관련 One-PMIS 내 공사기간 변경요청 사항에 대하여 아래와 같이 변경 처리하였음을 알려드리니, 시공사로 하여금 공정산정기초 재입력 등 시스템 내 변경사항 반영 후 공정관리토록 안내바랍니다.

가. 당초 공사기간 : 2007.11.20. ~ 2014.5.19

변경 공사기간 : 2007.11.20. ~ 2016.5.19

나. 변경근거 : 공기연장 통보(도로계획과-8434호,‘12.7.27)

다. 특이사항 : 실시협약 협상진행중

끝.

	건설총괄부장
주무관	장영준		건설정보관리과장	이현숙		건설총괄부장	04/23 강홍기
협조자
시행	건설총괄부-7471	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 덕수궁길 15 서소문별관 2동 3층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2382	/전송	02-3708-2327	/		/	대시민공개