문서번호	시설과-2767
결재일자	2014.4.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이동헌		남상국	04/24 함석주
협조

예방사방사업 폐기물 처리용역

준공기한 연기 검토 보고

2014. 4.

중부공원녹지사업소

시설과

예방사방사업 폐기물 처리용역

준공기한 연기 검토 보고

예방사방사업 폐기물 처리용역 중 현장여건에 따라 용역기간 변경사항이 발생하여 검토 보고드림.

□ 용 역 개 요

용 역 명 : 2014년 예방사방사업 폐기물처리용역

용역기간 : 2014. 3. 28. ~ 2014. 4. 26

도 급 비 : 10,050천원

도 급 자 : 서울환경 대표 양성희

용역내용 : 건설폐기물 335.12톤 운반 및 처리

□ 준공기한 연기

연기기간

- 당  초 : 2014. 3. 28 ~ 2014. 4. 26

- 변  경 : 2014. 3. 28 ~ 2014. 5. 30

연기사유 : 예방사방사업(예장동,이화동) 공사변경으로 인한 철거지연 등으로 본 공사일정에 맞춰 폐기물 처리기한 연기.

지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재는 중부공원녹지사업소, 지체상금은 미부과

□ 보고의견

상기와 같이 준공기한을 연기하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

첨부 : 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.