다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2013 행정포털 개선사업 주간보고 (20주)

2013 행정포털 개선사업의 20주차 추진실적을 보고 드리고자 합니다.

○ 추진기간 : 2014. 4. 21. ~ 4. 25.  (20 / 26주차)

○ 추 진 율 : 74% (계획 74%)

○ 추진실적

- 사업관리 : 74% (계획 74%)

· 감리 시정조치계획서 제출 및 산출물 보완 작업 진행

· 모바일오피스 개발 요건 정의 작성 진행

- UX/UI 컨설팅, 인프라 구성 : 100%

- 시스템 개발 : 80% (계획 80%)

· 스토리보드 작성(통합검색 완료, 관리자 작성중)

· 전체 퍼블리싱 : 4/25 완료 예정

· UX전환, 메인화면 개인화, 게시판 : 4/25 완료 예정

· 관리자 기능 : 5/3 완료 예정

· 통합검색 : 수집웹사이트 룰 등록 및 수집 진행, 권한 및 카테고리 SQL개발 진행, 로컬테스트 및 검색페이지 개발, Open-API 코드 개발

- 시험 및 운영 안정화 : 20% (계획 20%)

· 테스트계획/시나리오 수정 보완

· 단위테스트 체크리스트 작성

· 시스템전환 계획 협의 및 수정

붙임:  주간업무보고서(20주차) 1부.  끝.

주무관	김대원		프로젝트관리팀장	김기항		정보시스템담당관	04/24 임성우
협조자
시행	정보시스템담당관-5288	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 3층 정보시스템담당관	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2986	/전송	02-2133-1071	/	doomsday@seoul.go.kr	/	대시민공개