출 장 결 과 보 고 서

전문관		신재생에너지팀장	녹색에너지과장		결재
이경택		이노성	10/11 권민
협 조

	노을연료전지 건설현장에 대하여 2016.10.10.(월) 13:30~17:30에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 10. 11.
보 고 자 : 직 공업6급 성명 : 이경택

보 고 내 용
일 시	2016.10.10(월) 13:30~17:30
건 명	출장결과 보고
내용	◦ 출 장 지 : 마포구 상암동 월드컵공원 ◦ 출장내용 : 노을연료전지 건설 추진현황 및 현안사항 파악 ◦ 추진현황 - 발전소 건설은 정상추진중 : 발전소내 발전시설 및 부대설비 설치완료, 관리동 내부설비 배치 완료 마감 공사중, 외곽 가스인입공사 등 부대공사 진행중 - 유관기관 협조사항은 협의지연 : 마포구 요청사항, 서부공원녹지사업소 창고 신축, 외부 조경 등 관련기관 협의지연으로 실시설계도면 조속한 확정을 요청하고자 함. ◦ 조치계획 - 연료전지 발전시설 건설과 관련하여 창고신축, 조경계획, 도로포장, 마포구 요청사항에 대해 조속히 관련기관 협의를 조속히 마무리 하여 연내에 발전시설이 준공될 수 있도록 요청 하고자 함.
비 고