문서번호	시설과-7721
결재일자	2016.11.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장
한상길	공헌구	11/18 홍순길
협 조

서울대공원 복돌이동산 가족형 스포츠 테마파크 조성공사 준공기한 연기 검토 보고

2016. 11.

시 설 과

서울대공원 복돌이동산 가족형 스포츠테마파크 조성공사

준공기한 연기 검토 보고

명에의거 『서울대공원 복돌이동산 가족형 스포츠테마파크 조성공사』  감독업무 수행 중 다음과 같이 준공기한 연기 사유가 발생하여 보고합니다

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 서울대공원 복돌이동산 가족형 스포츠테마파크 조성공사

□ 공사기간 : 2015. 12. 17.  ~  2016. 11. 20.

□ 계약금액 : ***************

□ 계 약 자 : ************************

Ⅱ		연기사유

□ 준공기한 연기 요청 사유

- 복돌이초소 이전 및 추가 예산배정 지연에 따른 절대공기 부족

Ⅲ		조치의견

□ 준공기한 연기

-  위와 같은 사유로 준공기한을 아래과 같이 연기코자 함.

구 분	변 경 사 항		비 고
	당 초	변 경 후
공사기간	2015.12.17 ~ 2016.11.20.	2015.12.17. ~ 2016.12.30.

- 지체상금 부과여부 : 미부과.   끝.