투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행2회(어린이대공원 놀이동산 재조성사업 통신공사)

1. 시설과-1394(2014.04.24)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인「어린이대공원 놀이동산 재조성사업 통신공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조상사업 통신공사

나. 도 급 액 : 금87,934,000원

다. 공사기간 : 2012.12.13 ~ 2014. 04.30

라. 시 공 사 : (주)씨앤씨전력 대표 정행엽

마. 설계변경사유 : 물량정산

바. 공사비 변경내역

구 분		도 급 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
총공사비		97,111,990	82,107,990	감)15,004,000
도급비	공급가액	79,940,000	66,300,000	감)13,640,000
	부가가치세	7,994,000	6,630,000	감)1,364,000
	계	87,934,000	72,930,000	감)15,004,000
관급자재비		9,177,990	9,177,990	0

사. 예산과목 : 공원녹지정책과,공원녹지정책개발및만족도개선,시책주요   공원조성,어린이대공원놀이동산재조성,시설비및부대비,   시설비

붙임 1) 설계변경 검토 보고서 1부

2) 변경설계서 1부.  끝.

주무관	박진우		시설팀장	홍순철		시설과장	04/24 변규열
협조자	주무관	김인선
시행	시설과-1420	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	pjwooo@seoul.go.kr	/	대시민공개