투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제 목	2013회계년도 결산검사 자료 제출

1. 교통운영과-7567(2014.4.23.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소의 도로교통 소통개선사업, 횡단보도 확충정비사업에 대한 2013회계년도 결산검사 자료를 아래와 같이 제출합니다.

가. 설계변경 현황(총차기준)

당 초 (최초계약)					변경후 (최종 차수)					발주부서 (담당 전화번호)
공 사 명	회 사 명	계 약 일	완 공 예정일	계약금액	변경계약		완 공 예정일	계약금액	변경사유
					차수	일자
2013년 도로교통 소통개선 사업 교통신호기 공사	유유전기	‘13.9.11	‘14.2.26	83,781,161	1	‘14. 2.25	‘14.2.26	66,011,000	물량감소 (중암교 취소)	서부도로 사업소 기전과 (호정오, 300-8395)
2013년 횡단보도 확충정비 사업 교통신호기 공사	태화전기건설공사	‘13.9.16	‘14.2.26	85,150,638	1	‘14. 2.25	‘14.2.26	81,257,000	물량감소	서부도로 사업소 기전과 (호정오, 300-8395)

끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	호정오		기전과장	전결 04/25 장경옥
협조자	주무관	代이한진
시행	기전과-3959	(		)	접수		(		)
우	121-270	서울 마포구 가양대로 203	/	http://seoul.go.kr
전화	300-8395	/전송	300-8410	/		/	대시민공개