함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경(3회-최종) 계약의뢰(2013년 구로구 시설물, 소화전공사)

1. 우리사업소에서 시행하고 시설관리공단에 공사감독 업무를 위탁한 『2013년

구로구 관내 상수도시설물, 소화전공사(단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고 계약의뢰 합니다

가. 공 사 명 : 2013년 구로구관내 상수도시설물, 소화전 공사(단가계약)

나. 도 급 자 : 초우건설(주) 대표 정경순

다. 계약기간 : 2013. 5. 3 ~ 2014. 4. 30

라. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비.

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선교체비.

- 소방용수시설등의설치및관리, 소방용수시설설치및보수.

마. 설계변경 사유 : 시공물량 증감 및 신공정 발생에 따른 변동

바. 변경내역                                              (단위:원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
도 급 비	398,447,820	396,550,000	감 1,897,820
공급가액	362,225,291	360,500,000	감 1,725,291
부가가치세	36,222,529	36,050,000	감 172,529

따로붙임 : 1. 설계변경 시행 1부.

2. 설계변경 보고서 1부.

3. 설계변경 서류 1부.

4. 설계변경 심의 결과서 1부.

5. 합의서 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	황청연		주무관	김용호		급수운영과장	04/25 代유인행
협조자
시행	급수운영과-9739	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02)3146-3949	/전송	02)3146-3989	/		/	대시민공개