문서번호	시설보수과-1534
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	04/25 정진오
협 조

준공기한 연기보고

[중랑교 보수ㆍ보강공사]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 4

성동도로사업소

【시설보수과】

준공기한 연기 보고

우리사업소에서 추진중인『중랑교 보수ㆍ보강공사』를 시행함에  준공기한 연기사유가 발생하여 이에 대한 검토 보고임

Ⅰ		사 업 개 요

공 사 명 : 중랑교 보수ㆍ보강공사

공사기간 : 2013.05.02 ~ 2014.05.01

(2차 : 2014.03.05 ~ 2014.05.01)

사 업 비

구 분		총 차	1 차	2 차	장 래 분	비고
총 공사비		3,309,536,800	1,040,000,000	1,900,000,000	369,536,800
도급액	공급가액	2,720,497,300	756,860,937	1,627,693,818	335,942,545
	부 가 세	272,049,730	75,686,093	162,769,382	33,594,255
	계	2,992,547,030	832,547,030	1,790,463,200	369,536,800
관 급 비		257,067,970	147,531,170	109,536,800	-
이설비및기타		59,921,800	59,921,800	-	-

공사개요 : 교면포장 30a, 보도정비 7.5a, 받침교체 168개소,

브라켓 설치 98개소, 교각 내진보강 6개소

슬래브 강결 154m, 신축이음교체 200m 등

도 급 자 : 유성건설주식회사 대표 이영주

Ⅱ		준공기한 연기

관련근거 : 시설관리공단 공사감독2처-5070(2014.4.25)

사    유

- 총차 : 본 공사는 2013.04.17 장기계속공사로 계약하여 시행중인         공사로써 총공사비 33억 중 29억만 예산확보하여 추진중에         있으나, 공사비 부족액(4억)을 추가 확보하여 3차(잔여)공사         시행이 요구됨

※ 2014년 추가경정예산 등 예산 추가확보 후 추진

- 2차  : 교량하부 단면증강을 위한 유관기관 첨가시설물(KT,            SK브로드밴드) 이설 지연에 따른 공기연장

※ 첨가시설물 이설 완료일

ㆍ당초 2014.03.05 ⇒ 변경 2014.04.30(56일 지연)

준공기한 연기

- 총차 : 당초 준공기한 : 2014.05.01

변경 준공기한 : 2014.12.31

- 2차  : 당초 준공기한 : 2014.05.01

변경 준공기한 : 2014.06.27(증56일)

관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제90조

지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		조 치 의 견

상기 보고내용과 같이 본 공사기간이 부족한 사항으로 준공

기한을 연기 조치하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 시설관리공단 검토보고서 1부.  끝.