투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰(시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금사업 실시설계용역)

우리부서에서 시행중인 『시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금사업 실시설계용역』과 관련 아래와 같이 준공기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 용역개요

가. 용 역 명 : 시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금사업 실시설계용역

나. 용역기간 : 2014. 03. 20 ~ 2014. 04. 28

다. 계약금액 : 금9,010,000원

라. 도 급 자 : 이에이조경기술사사무소 대표 주용규

2. 연기요청 기간

구 분	당 초	변 경
공사기간	2014.03.20 ~ 2014.04.28	2014.03.20 ~ 2014.05.16

3. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

5. 연기사유 : 별첨 연기사유 참고

붙 임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 준공기한 연기검토 보고서 1부.

3. 준공기한 연기 요청 공문 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최종성		시설팀장	홍순철		시설과장	04/25 변규열
협조자
시행	시설과-1450	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소	/
전화		/전송	02-2181-1169	/		/	대시민공개