문서번호	시설과-1449
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
최종성		홍순철	04/25 변규열
협조

「시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금사업 실시설계용역」

준공기한 연기 검토보고

2014.04

동부공원녹지사업소

(시설과)

「시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금사업 실시설계용역」

준공기한 연기 검토보고

용역개요

❍ 용 역 명 : 시립고덕양로원 등 2개소 녹색자금사업 실시설계용역

❍ 용역기간 : 2014. 03. 20 ~ 2014. 04. 28

❍ 계약금액 : 금 9,010,000원

❍ 도 급 자 : 이에이조경기술사사무소 대표 주용규

준공기한 연기검토

❍ 검토사유 : 준공기한 연기

❍ 연기사유

- 대상지내 위치 조정, 추가로 인한 계획검토 및 해당기관(시립고덕양로원, 구립서초남서울어린이집)과의 업무협의 추가로 인한 절대공기 부족

❍ 준공기한 변경

- 당 초 : 2014. 03. 20. ~ 2014. 04. 28

- 변 경 : 2014. 03. 20. ~ 2014. 05. 16(18일간)

❍ 지체상금 부과 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

조치계획

❍ 용역사의 준공기한 연기 신청내용이 타당하다고 판단되므로 계약부서에 변경계약(준공기한 연장계약) 요청하고자 함

붙임 : 준공기한 연기 신청 공문 1부.  끝.