다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	「독립의 언덕」용역 준공기간 연기(2차)

1. 복지정책과-10905(2014.04.24)호와 관련입니다.

2. ‘독립의 언덕’ 조성을 위한 타당성조사 및 기본계획수립 용역과 관련 계약 당사자간 합의(서울시, 서울연구원)에 의해 아래와 같이 준공기간을 연기코자 합니다.

가. 용 역 명 : 「독립의 언덕」 조성을 위한 타당성조사 및 기본계획수립 용역

나. 계 약 자 : (재)서울연구원,(주)동심원조경기술사사무소,(주)건축사사무소 기오헌

다. 계약금액 : ￦385,000,000원(변경없음)

라. 계 약 일 : 2013.7.9.

마. 용역변경내용

- 연기기간

구 분	당 초	변 경	비 고
용역기간	’13.7.9. ~ ’14.4.30.	’13.7.9. ~ ’14.5.31.	1개월 연장

- 연기사유 귀책소재 : 당사자 간 합의

- 지체상금 부과여부 : 미부과

- 연기사유 : 독립근린공원조성계획 변경결정을 위한 열람공고 결과 공원관리부서 요구에 의한 주민설명회 실시로, 당초 2014년 2월 예정이던 시 도시공원위원회 심의가 4월에 개최됨에 따라 심의결과 반영 보완을 위해 용역수행기간 연장

바. 예산과목 : 변경없음

첨부 :  「독립의 언덕」 용역 변경 계획  1부.  끝.

주무관	서정권		보훈복지팀장	장화영		복지정책과장	04/25 엄의식
협조자	계약1팀장	김점선
시행	복지정책과-11029	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110, 4층	/
전화	02-2133-7323	/전송	02-2133-0718	/	kwaon@seoul.go.kr	/	대시민공개