투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	실정보고(폐기물 추가 발생) 승인(도림교 확장)

1. 문서번호 : SMIH-14-24270

2. 도림(감) 제14-29호(2014. 4.23)와 관련하여 『도림교 확장공사』의 설계 누락 및 지장물에서 추가 발생된 건설폐기물에 대하여 실제 폐기물 처리 물량에 의거 설계변경에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 도림교 확장공사

나. 승인내용 : 건설폐기물 추가 발생 물량 처리 (V=149.8㎥)

※ 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템을 이용하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

첨부 : 업무 연락전 1부.  끝.

주무관							정문수			광역도로과장					04/25 代조양연
협조자
시행			토목부-8025									(						)		접수											(						)
우	100-739					서울특별시 중구 덕수궁길15 2동3층(서소문동)															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2561						/전송			02-3708-2599					/	msjeong13@seoul.go.kr												/	대시민공개