문서번호	시설과-1448
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
최지효	홍순철	변규열		04/25 이춘희
협 조

『보라매 무장애 친화공원 조성공사』 준공기한 연기 검토 보고

2014. 4.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(	열람공고,주민설명회 시행	)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(	아이랜드 의견수렴 등	)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(	전문가 자문 시행	)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(	광진구청	)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유■	(	시설관리공단	)	무 □

『어린이대공원 놀이동산 재조성공사』

준공기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인 『보라매 무장애 친화공원 조성공사』 관련하여 감독처로부터 ‘준공기한 연기 검토보고’가 있어 아래와 같이 검토보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 보라매 무장애 친화공원 조성공사

공사기간 : 2012. 12. 20 ~ 2014. 4. 30

총공사비 : 471,021,270원(도급 389,149,000원 / 관급 81,872,270원)

도 급 사 : 레이크랜드(주) 대표 이숙자

감 독 처 : 서울시시설관리공단 공사감독3처

Ⅱ		검 토 내 용

연기사유

- 추가공종 발생 및 포장공법 변경으로 자재구입 등에 소요되는 시일 확보 필요

준공기한 변경

- 당초 : 2013. 12. 20 ~ 2014. 04. 30

- 변경 : 2013. 12. 20 ~ 2014. 05. 20

지체상금 부과 검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅲ		처 리 의 견

감독처로부터 제출된 준공기한 연기사유가 타당하다고 판단됨으로 계약부서에 준공기한 연기 요청하고자 함.

붙임 : 준공기한 연기요청 보고서 및 공문 각 1부(시설관리공단).