문서번호	토목부-7953
결재일자	2014.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
정문수		代조양연	04/25 노우성
협조

부대 시설물 설계반영 보고

( 도림교 확장공사 )

2014.  4.

서울시도시기반시설본부

( 토  목  부 )

부대 시설물 설계반영 보고

( 도림교 확장공사 )

본 공사에 대한 예비준공검사시 시설물 관리부서 요구사항 및 현장점검 지적사항을 설계변경에 반영하고자 보고하는 내용임.

※ 부대 시설물 현황 : 배수시설 정비 등 4건,   소요예산 : 11,517천원

□ 공사개요

◦ 공 사 명 : 도림교 확장공사

◦ 규    모 : 도로확장 폭30m(6차로) → 41.5m(9차로),  연장84m

- 도 림 교 : 폭41.5 (차도30m, 보도11.5m),  연장60m

◦ 공사기간 : 2012. 6. 8 ~ 2014. 4.30

◦ 도 급 비 : 2,324백만원

◦ 시 공 사 : 서남종합건설(주), (주)감천토건

◦ 감 리 사 : (주)동일기술공사, (주)수성엔지니어링

□ 감리단 검토 의견

◦ 본 공사는 도림천에 설치된 기존 도림교와 별개로 보도교를 기존 도림교 상하류에 설치하고 보도를 차도로 전환하여 차로수를 확대하는 공사로,

◦ 예비준공 검사시 시설물 관리부서 요구사항 및 현장점검 지적사항에 대하여 도림천 둔치 이용자의 편익 제공, 원활한 배수처리 및 원활한 시설물 유지관리를 위하여 실정보고 승인 후 공사시행이 타당함.

◦ 부대시설물 현황

구 분	수량	비 고
옥외용 벤치 설치	4개소	∘영등포구청 요청사항 (상세 A)
신축이음 배수	4개소	∘예비준공검사 요구사항 (상세 B)
자전거 운행자 안전시설 설치	2개소	∘예비준공검사 요구사항 (상세 C)
기존 교량 집수구 인상	23개소	∘현장점검 지적사항 (상세D)

◦ 현황도

영등포방향

구로방향

상세 “A"

상세 “B"

상세 “C"

상세 “D"

옥외용 벤치 설치구간	신축이음 배수처리
옥외용 벤치 설치	신축이음부 배수 시설
안전시설 설치구간	기존교량 집수구 인상
자전거 운행자 안전시설 설치	기존교량 집수구 인상

□ 조치계획

◦ 상기와 같이 예비준공검사시 요구사항 및 현장점검 지적사항에 대하여 감리단 검토의견에 따라 우선 공사 시행 후 설계변경시 반영하고자 합니다.

- 소요예산 : 11,517천원

첨부 : 감리단 검토 의견서 1부.  끝.