문서번호	방재시설부-2242
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		代오수양	04/28 박종웅
협조

공릉2빗물펌프장 및 면목4동 배수관로 설치공사

가배수로관로 설치 검토 보고

2014. 4

도시기반시설본부

(방재시설부)

공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

가배수로관로 설치 검토 보고

면목4동 배수관로 설치공사와 관련하여 서울시시설공단으로부터 면목4동 고지배수관로 추진기지 설치에 따른 가설배수관로(물돌리기) 부설에 따른  현장실정 보고사항이 있어 이에 대한 검토 보고임.

사업개요

❍ 공 사 명 : 공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동 배수관로 설치공사

❍ 규    모

- 공릉2빗물펌프장 : 토출용량 Q=520㎥/분, 인입관거 412m

- 면목4동 배수관로 : 강관추진 52m, 배수관로 설치  380m

❍ 사업기간 : 2013. 1. 8 ∼ 2015. 6. 30

❍ 감리사/시공사 : 시설관리공단/(주)승영기술공사외 1개사

❍ 도 급 비 : 5,365백만원

실정보고 내용

❍ 현황 및 문제점

- 면목4동 고지배수관로(D1500mm@2열, 26m) 추진기지 위치가 기존 배수관로(□3.5×2.5)상에 위치하고 있어

- 추진기지 설치전에 당초 계획된 저지배수관로(□1.0×1.0)부설 후 우수 및 오수를 처리하고자 하였으나. 추진기지 가시설 저촉 및 사유지 저촉으로 저지배수관로 우선 부설이 불가한 실정으로

- 기존 하수처리를 위하여 추진기지 옆으로 가배수관로(물돌리기)부설이 불가피한 실정임

․ 위치 및 배관로

․ 가배수관로(물돌리기) : 이중벽관(D800mm), 연장16m

․ 개략공사비 : 11,660천원

감리검토내용

❍ 상기와 같이 추진기지 설치에 따른 우수 및 오수처리를 위한 가배수관로(물돌리기)를 설치함이 타당하다고 사료됨

보고자 의견

❍ 상기내용을 검토한 결과 서울시시설공단 위탁감독이 제출한 현장실정 보고사항이 적합한 것으로 판단되어 승인조치하고자 함.

붙임 : 1. 현장실정보고 검토서 1부.

2. 공사비 산출내역 1부. 끝.