투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(보라매 무장애 친화공원 조성공사 폐기물 처리용역)

1. 시설과-1461(2014.04.28)호의 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 「보라매 무장애 친화공원 조성공사 폐기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 보라매 무장애 친화공원 조성공사 폐기물 처리용역

나. 용역기간 : 2013. 12. 20 ~ 2014. 4. 30

다. 도 급 액 : 8,010,000원

라. 도 급 자 : ㈜좋은세상과환경 대표 김석영

마. 준공기한 연기

- 당초 : 2013. 12. 20 ~ 2014. 04. 30

- 변경 : 2013. 12. 20 ~ 2014. 05. 20

바. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임  1. 준공기한연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기조치 의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최지효		시설팀장	홍순철		시설과장	04/28 변규열
협조자
시행	시설과-1470	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소	/
전화		/전송	02-2181-1169	/	charity3@seoul.go.kr	/	대시민공개