투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신	공원운영과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기의뢰(보라매 무장애 친화공원 조성공사)

우리 사업소에서 시행 중인 『보라매 무장애 친화공원 조성공사』 에 소요되는 관급자재의 납품기한을 아래와 같이 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 건   명 : 보라매 무장애 친화공원 조성공사 관급자재

2. 관급자재 현황

품 명	계약번호	규 격	납품기한	계약자
등의자	00128234200	OLB-2021	2014. 4. 30	㈜세민조경
경화토포장	12121044203	FC-H7, 건식	2014. 4. 30	㈜에프씨코리아랜드
토양개량제	00135099500	바이오그로-인산퇴비	2014. 4. 30	㈜가림환경개발

3. 변경 납품기한 : 2014. 5. 20

4. 연기사유 : 「보라매 무장애 친화공원 조성공사」 준공기한이 연기됨에 따라 관급자재 납품에 소요되는 시일 확보 필요

5. 연기사유 귀책소재 : 서울특별시 동부공원녹지사업소

6. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙 임 : 납품기한 연기검토보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	최지효		시설팀장	홍순철		시설과장	04/28 변규열
협조자
시행	시설과-1471	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로20길 33 동부공원녹지사업소	/
전화		/전송	02-2181-1169	/	charity3@seoul.go.kr	/	대시민공개