투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한연기 의뢰(국립중앙의료원 담장개방 녹화사업 실시설계용역)

1. 시설과-2851(2014.4.28)호와 관련입니다.

2. “국립중앙의료원 담장개방 녹화사업 실시설계용역” 준공기한을 다음과 같이 연기하고자 하니 조치 하여 주시기 바랍니다.

가. 용역현황

- 용 역 명 : 국립중앙의료원 담장개방 녹화사업 실시설계용역

- 용역기간 : 2014. 3. 12 ~ 2014. 4. 30

- 도 급 비 : 14,700,000원

- 도 급 사 : ㈜에코밸리 대표 이재흥

나. 준공기한 연기

용 역 명	계약일	착공일	준 공 기 한		비 고
			당 초	변 경
국립중앙의료원 담장개방 녹화사업 실시설계용역	‘14.3.12	‘14.3.12	‘14.4.30	‘14.5.30

다. 연기사유 : 국립중앙의료원의 의견반영을 위한 협의중 병원측의 내부 검토기간이 추가로 필요하여 연기

첨부  1. 방침서 1부.

2. 준공기한연기의뢰서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	이동헌		주무관	남상국		시설과장	04/28 함석주
협조자
시행	시설과-2855	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관2층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5919	/전송	02)3783-5969	/	oil0824@seoul.go.kr	/	대시민공개