투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교통운영과장)
(경유)
제목	중랑교 보수,보강공사 기간 변경에 따른 교통소통대책 변경 제출

1. 교통운영과-1209(2014.1.21)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 ″중랑교 보수,보강공사″에 대하여 공사기간 변경에 따른 교통소통대책 변경사항에 대하여 아래와 같이 제출합니다.

가. 공 사 명 : 중랑교 보수,보강공사(2차)

나. 위    치 : 중랑교(동대문구 휘경동 9 ~ 중랑구 상봉동 474)

다. 공사기간 : 2014.03.05. ~ 2014.06.27

※ 점용기간 :  당초 2014.03.03 ~ 2014.04.27(48일간)

변경 2014.03.16 ~ 2014.05.20(56일간)

라. 변경사유

1) 공사 실 착수일 지연에 따른 변경(예산배정 지연 및 홍보기간)

2) 기상 및 현장여건 변경 등

마. 교통통제 내용 : 중랑교 보수,보강공사에 따른 중랑교(망우로) 1~2개차로씩 부분통제

바. 공종별 교통통제 변경 현황

공종		통제기간	통제계획	통제시간	비고
구조물 강 결		-	-	-	완료
보도정비	당초	4월2일(수)~ 4월15일(화)	편도3차로중 1개차로 일지적으로 부분통제	주간 공사 07:00 ~ 18:00	-출,퇴근시간대 교통 미통제 -점용면적변경 없음
	변경	4월16일(수)~ 5월12일(화)	편도3차로중 1개차로 일시적으로 부분통제	주간 공사 08:00~17:00
포 장	당초	4월18일(금)~ 4월20일(일)	편도3차로중 1~2개차로 부분통제	주,야간 공사 22:00 ~ 익일 21:00
		4월26일(토)~ 4월27일(일)	편도3차로중 1~2개차로 부분통제	주,야간 공사 22:00 ~ 익일 21:00
	변경	4월25일(금)~ 4월27일(일)	편도3차로중 1~2개차로 부분통제	주,야간 공사 22:00 ~ 익일 21:00
		5월2일(금)~ 5월6일(화)	편도3차로중 1~2개차로 부분통제	주,야간 공사 22:00 ~ 익일 21:00
신축이음 교 체 (당일굴착 당일복구)	당초	4월16일(수)~ 4월27일(일)	편도3차로중 1~2개차로 부분통제	야간공사 22:00 ~ 익일06:00
	변경	5월5일(월)~ 5월20일(화)	편도3차로중 1~2개차로 부분통제	야간공사 22:00 ~ 익일06:000

따로붙임  위치도 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	임승민		시설보수과장	04/28 박춘배
협조자
시행	시설보수과-1561	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1558	/전송	02-2210-1549	/		/	대시민공개