함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	작업기한 연기요청에 대한 (승인)회시

1. 공사감독2처-5241(2014.4.28.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 귀 공단에서 감독중에 있는 「2013년 동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속)」 공사에 대한 준공기한 연기요청에 대하여 아래와 같이 (승인)회시 하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기내역

지시번호	공종	당초	변경	비고(사유)
소화전보수 (56,57번)	소화전보수	3.10~4.30	3.10~5.30	관급자재(철개) 수급지연
시설물보수 (145번)	대현산 배수지 환경정비	4.17~5.16	4.17~6.14	선행작업(기전설비 공사) 미실시(지연)

	동부수도사업소장
주무관	강무진		주무관	정윤상		시설관리과장	04/28 이시우
협조자
시행	시설관리과-9758	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	3146-2803	/전송	02)3146-2839	/	big4sun@seoul.go.kr	/	대시민공개