함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	강북 고도정수처리시설 2차 연결공사 추진일정 송부 및 협조 요청

1. 배수과-2683호(2014.4.23.)와 관련입니다.

2. 강북 고도정수처리시설과 기존 정수시설 연결공사의 2차 공사가 2014. 4.29(화) 11:00부터 동일 24:00까지 시행될 예정(공사시간 13시간)이오니 관련부서 및 구리시, 남양주시의 적극적인 협조를 부탁드립니다.

◈ 2차 공사를 위한 사전 준비사항

- 준비기간 : 2014. 4. 28(월) ~ 4.29(화) 11:00 까지

- 조치사항 : 강북수계 관련배수지 및 구의, 암사정수장 수계 배수지 최대수위 확보

- 관련배수지 현황 및 他 정수장 급수지원

① 강북수계 : 공릉, 월계, 월곡, 북악터널, 불광터널, 백련배수지

② 구의, 암사 수계 : 용마, 아차산, 반포, 방배, 우면산(서초, 낙성대)

③ 최종공사【 5.15(목) 】완료시까지 구의, 암사정수장은 계속 급수지원

④ 최종공사【 5.15(목) 】완료시까지 강북, 구의, 뚝도, 암사 정수장

관련배수지의 시설보수, 항청소 등 작업 금지

⇒ 대현산, 아차산 배수지 항청소 금지

⑤ 시계외 지역 : 구리시(강북), 남양주시(지금, 별내) 관련배수지

최대수위 확보

◈ 2차 공사 추진계획

- 공사일시 : 2014. 4.29(화) 11:00 ~ 24:00(13시간)

- 별도의 추가 수계전환없이 강북수계 및 지원정수장 관련배수지의 수위 확보하여 공사시행 예정.

※ 관련 수도사업소(중부,서부,동부,북부)에서는 4.29(화) 24:00에 2차 연결공사가 완료된 이후 강북수계 생산량 환원에 따른 급수계통상 흐름변화 등으로 수질사고가 발생되지 않도록 관련 배수지 수위 및 수질 변화에 유의하여 급수운영에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

※ 3~4차(2계열) 공사는 2차 공사 이후 관계자회의를 통해 급수운영상 문제점 및 조치사항 협의후 차후일정 통보(예정)

따로붙임 : 2차 연결공사 추진계획 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	구리시장(수도과장),남양주시장(수도과장),생산관리과장,기전설비과장,시설과장,시설관리과장,중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,북부수도사업소장,강남수도사업소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
★주무관	김지환		배수과장	전결 04/28 박기범
협조자	주무관	김기범		주무관	신근호
시행	배수과-2771	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개