투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	잠실역지하광장조성공사 책임감리용역 설계변경(2차2회, 총괄3회) 시행 및 의뢰

우리 본부에서 시행중인 『잠실역지하광장조성공사 전면책임감리용역』에 대하여 설계변경(2차2회, 총괄3회)을 시행코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 잠실역지하광장조성공사 전면책임감리용역

나. 용 역 비 : 2,093,000천원 (2차 : 1,449,500천원)

다. 용역기간 : ‘12. 5. 7 ～ ’14. 4.30. (2차 : ‘13. 5.15 ～ ’14. 4.30)

라. 용 역 사 : ㈜한국건설관리공사 외 1 대표 김해수

마. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
감 리 비	2차	1,449,500천원	1,696,300천원	증 246,800천원
	총차	2,093,000천원	2,339,800천원
용역기간	2차	'13. 5.15 ~ '14. 4.30	'13. 5.15 ~ '14. 6.30	증 2개월
	총차	'12. 5. 7 ~ 14. 4.30	'12. 5. 7 ~ 14. 6.30

바.  변경사유 : 공사 준공기한 연기에 따른 감리원 투입계획 변경 등

사. 예산과목 : 세입세출외 현금

붙임 1) 감리용역 준공기한 연장에 따른 설계변경 검토보고서 1부.

2) 책임감리용역 설계변경 요청 공문 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	장기철		토목총괄과장	김영수		토목부장	04/28 노우성
협조자	계약2팀장	代전종남
시행	토목부-8112	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 2동 3층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2546	/전송	02)3708-2599	/	jjang2235@seoul.go.kr	/	대시민공개