투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	납품기한 연기요청[2014년 예방사방사업(예장동,이화동)]

『2014년 예방사방사업(예장동,이화동)』과 관련하여 기 계약된 관급자재에 대하여 다음과 같이 납품기한 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 레미콘 조달구매[2014년 예방사방사업(예장동,이화동)]

나. 납품기한 연기 요청내역

공사명	품명	물품식별 번 호	규격	단위	수량	단가	금액	납품기한		비고
								당초	변경
2014년 예방사방사업(예장동,이화동)	레미콘	10063096	레미콘, 25-21-12	㎥	67	61,260	4,104,420	‘14.4.28	‘14.5.30

다. 연기사유 : 전문가 자문결과 및 현장여건에 따른 공사일정 조정.  끝.

	시설과장
주무관	이동헌		주무관	남상국		시설과장	04/28 함석주
협조자
시행	시설과-2852	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231 남산별관2층	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02)3783-5919	/전송	02)3783-5969	/	oil0824@seoul.go.kr	/	대시민공개