문서번호	하천관리과-6700
결재일자	2014.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제144호

					시 민
주무관	하천관리과장	물관리정책관	도시안전실장		행정2부시장
이병우	한유석	정만근	조성일		04/22 김병하
협 조
	문화관광디자인본부장			한문철
	도시계획국장			이제원
	푸른도시국장			오해영
	자연생태과장			김재경
	역사도심관리과장			이정화
	조직담당관			정상훈
	도시안전과장			김현식
	교통운영과장			강진동
	역사문화재과장			황요한
	청계천관리팀장			지세진

「청계천 개선보완 마스터플랜 수립」

학술연구 용역결과 및 향후계획

2014. 04.   .

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

「청계천 개선보완 마스터플랜 수립」

학술연구 용역결과 및 향후계획

2005년 청계천 복원시 미흡했던 부분과 운영과정에서 나타난 문제점 개선을 위한「청계천 개선·보완 마스터플랜 수립」학술연구 용역결과 및 향후계획 보고임

□ 학술연구 용역개요

❍ 용역명 :「청계천 개선·보완 마스터 플랜 수립」학술연구 용역

❍ 기  간 : 2013. 3. 22 ~ 2014. 2. 28

❍ 연구기관 : 서울연구원

❍ 계약액 : 449,823천원

❍ 과업내용

- 청계천 유역(51㎢)에 대한 분야별(생태환경,역사문화,도시제도) 개선    보완 마스터 플랜 수립연구 등

□「학술연구 용역」결과 요약

❍ “청계천 역사성 및 자연생태성 회복” 비전 및 목표

❍ 목표 구간설정

❍ 6개 전략 및 22개 중점과제

❍ 장단기 추진계획

(단위 : 천원)

방 향	사업명	총사업비	단기(‘14 ~‘18)	중기(‘19 ~‘30)	장기(‘31 ~‘50)
	6개 전략사업	374,842,156	34,872,613	35,322,717	304,646,826
역사문화 계승하는 매력있는 청계천	소 계	26,105,000	6,557,000	9,746,000	9,802,000
	청계천 문화유적 회생	22,725,000	3,577,000	9,346,000	9,802,000
	청계천변 하천문화 활성화	3,380,000	2,980,000	400,000	-
자연생태가 살아 숨쉬는 청계천	소 계	329,714,000	22,470,400	17,827,600	289,416,000
	도시가 숨쉬는 자연환경 회복	47,064,000	20,475,000	15,269,000	11,320,000
	하천 스스로 발전유도	282,650,000	1,995,400	2,558,600	278,096,000
도심 활력공간 청계천	소 계	19,023,156	5,845,213	7,749,117	5,428,826
	시민발길 편한 보행환경 조성	12,015,388	5,545,213	5,265,384	1,204,791
	청계천과 함께하는 지역관리	7,007,768	300,000	2,483,733	4,224,035

□ 추진 경과

○ ’12. 2. 28 : 서울시장 청계천 투어시 기자회견(수표교 터)

- 청계천 생태․환경, 역사․문화, 도시․제도 개선·보완을 위한 청계천 시민위원회 구성운영

○ ’12. 3. 23 : 청계천시민위원회 구성 및 발족(발족회의 개최)

- 총26인 : 공동위원장3(행정2부시장, 민간2인), 위원23인

○ ’12. 4 ~ 12월 : 청계천 개선보완 방향 논의(청계천시민위원회)

- 전체회의 7회 및 3개분과 회의 각5회 개최

- 청계천 개선보완을 위한 연구용역 추진 건의

○ ’13. 1 ~ 3월 : 청계천 개선보완 방향검토 및 보고(위원회→시장)

- 청계천TF위원회 구성·운영, 요약보고서 작성 보고(’13. 3. 26)

○ ’13. 3 ~  ’14. 2 : 청계천 개선보완 연구용역(서울연구원)

- 시민의견청취 2회(’13.6월, 12월), 청계천시민위원회 보고(4회)

- 청계천 2050 마스터플랜(안) 작성

○ ’14. 1. 15 : 청계천 2050 마스터 플랜 보고(위원회→시장)

- 청계천 2050 마스터 플랜 발표준비 지시

○ ‘14.02. 20 : 현안사항 검토회의(부시장단, 실본부국장)

- 청계천시민위원회에서 발표

- 발표 명칭변경 : 청계천2050마스터플랜 ⇒ 청계천 역사성 및 자연생태성 회복

○ ‘14.02. 24 : 현안사항 검토회의 결과보고(물관리정책관 → 시장)

- 청계천 개선보완 학술연구 결과 발표는 청계천시민위원회에서 발표

○ ‘14.03. 12 : 청계천 역사성 및 자연생태성 회복 발표(청계천시민위원장)

- 보도자료 배포, 청계천시민위원장 기자설명회

- 서울시 출입기자 50여명 참석, 중앙일간지 및 매스컴 취재보도

□ 발표사항 및 후속 조치계획

❍ 보도자료 배포 및 발표내용

- 청계천시민위원회,「청계천 역사성 및 자연생태성 회복(안)」마련, 서울시 건의

- 제자리 찾지 못하고 있는 장충단 공원 '수표교 원위치 중건'해 역사성 회복

- 저수로 중간 중간에 굴곡 만들어 자연 물길 유도, 여울보 29개소 지그재그형 개선

- 청계천 용수 공급비 연 18억 원 절감위해 백운동천 등 물길 복원해 용수 활용

- 모전교 등 교차로 14곳 크로스형 횡단보도 설치 등 보행자 중심거리 조성

- 하천관련 종사 시민 등 '청계천지킴이' 선발, 시민 참여형 거버넌스 구축

- 수표교 원위치 중건 타당성조사 통해 신중 검토 후 추진여부 결정

❍ 타당성 검증이 필요한 사업 조치계획

- 타당성 조사 및 기본계획 용역 추진, 실현가능성 검증(2014년)

▸수표교길 연결정비 방안 타당성조사 및 기본계획 용역

▸지천 물길회복(백운동천, 삼청동천) 방안 타당성조사 및 기본계획 용역

- 용역결과 사업타당성 검증후 조치계획

▸투자심사 및 중기재정계획 반영

▸기본 및 실시설계 추진

❍ 타당성 검증이 필요치 않은 사업 조치내용 및 계획

- 청계천 본류 생태환경 개선

▸기본 및 실시설계 용역 추진 및 일부 시범사업 시행 예정

- 청계천 유지용수 공급비용 절감을 위한조치

▸유지용수 공급량 축소조정(12만톤/일→4만톤/일) 통보 : 2014. 1. 27

- 청계천변 교차로 14곳 크로스형 횡단보도 설치 등 보행자 중심거리 조성

▸교통운영과에서 크로스형 횡딘보도 설치검토 통보 : 2014. 4. 1

-  '청계천지킴이' 선발, 시민 참여형 거버넌스 구축 등

▸자치구(종로,중구,동대문,성동,성북) 와 시설관리공단 협의후 조치예정

□ 향후 계획

❍ 부서별 후속업무 분담계획

추진 부서	주 요 내 용	비고
도시안전실	▸ 청계천시민위원회 총괄 운영 ▸ 청계천 역사성 및 자연생태성 회복 총괄 ▸ 물환경분야 개선사업 추진	3개 실·본부·국 관련사업 추진
문화관광 디자인본부	▸ 청계천시민위원회 역사문화분과 운영 ▸ 역사문화분야 개선사업 추진	2개 실·본부·국 관련사업 추진
푸른도시국	▸ 청계천시민위원회 생태환경분과 운영 ▸ 생태환경분야 개선사업 추진	〃
도시계획국	▸ 청계천시민위원회 도시제도분과 운영 ▸ 도시제도분야 개선사업 추진	〃

❍ 2014 확보예산 및 집행계획

- 확보예산(2건)                :  1,600백만원

▸청계천 개선보완 사업            :  1,000백만원

▸청계천 경사면 식재 수종갱신 사업 :    600백만원

- 집행계획(안)

사업명		시설비			담당부서 (주관/협조)
		계	설계비	공사비
	4건	1,600	650	950
1	수표교길 연결 주변정비 방안 타당성조사 및 기본계획	250	250	0	하천관리과 역사문화재과
2	청계천 생태환경 개선사업 기본 및 실시설계	1,062	200	862	하천관리과 자연생태과
3	지천(백운동청,삼청동천)복원 타당성조사 및 기본계획	200	200	0	하천관리과 역사도심관리과
4	청계천변 크로스횡단보도 설치사업	88	0	88	교통운영과

- 예산과목 : 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천관리, 하천                      복원 및 정비, 청계천 개선보완사업, 시설비.

❍ 단계별 추진계획

- 2014년 타당성조사 및 기본계획 용역추진(2건)

▸수표로 연결정비 방안 타당성조사 및 기본계획 용역

※ 수표교 중건, 준천사터 역사문화센터 건립, 전통문화거리 조성, 근린공원               조성, 도로 및 하천(하수도) 선형변경, 인접지 도시계획 조사검토 등.

▸지천(백운동천, 삼청동천) 복원방안 타당성조사 및 기본계획 용역

※ 지류(인왕산 과 백악산 계곡)와 본류(청계천) 연결방안 조사검토

- 2014년 기본 및 실시설계 용역추진(1건)

▸청계천 본류 생태환경 개선 기본 및 실시설계 용역

※ 물놀이구간CSOs저감, 계곡 및 지하철배출수 유입, 물흐름 다양성 유도,

홍수터(고수부지) 수목식재 등 현재 실현가능한 사업

- 2014년 타당성조사 및 기본계획 용역에서 실현가능성 검증된

사업에 대하여 별도 추진계획 수립시행

□ 행정사항

❍ “청계천 역사성 및 자연생태성 회복” 후속업무 적극 추진

- 학술연구 용역이 완료되었으므로 실무부서에서 검토하여 적극          추진(하천관리과,역사문화재과,역사도심관리과,자연생태과,교통운영과).

❍ “청계천 역사성 및 자연생태성 회복” 업무추진 전담조직 신설 검토

- “청계천 역사성 및 자연생태성 회복” 업무는 장기·지속적으로         추진될 업무로 업무량 등을 고려하여 적합한 조직신설 검토           (도시안전과, 조직담당관).

붙임 : 1) 총괄 재정계획(안) 1부.

2) 세부 추진계획(안) 1부.  끝.