문서번호	시설개선과-1880
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설개선과장		체육시설관리사업소장
김기탁	박관현	신동호		04/29 박준양
협 조

풋살경기장 전기공사 추진계획

2014. 4.

체육시설관리사업소

(시 설 개 선 과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무 ■
	●	기타	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

풋살경기장 전기공사 추진계획

체육공원 내 풋살경기장 조성에 따른 전기공사를 시행하여 시민들에게 여가선용 기회를 제공하고 잠실운동장 활성화에 기여하고자 함.

Ⅰ		추진근거

❍ 제2풋살경기장 조성 및 운영 계획 【운영1과-3434(2014.02.21)】

❍ 풋살경기장 조성공사 실시설계용역(전기) 시행 【시설개선과-281(2014.03.20)】

Ⅱ		공사계획

❍ 공 사 명 : 풋살경기장 전기공사

❍ 공사개요

- 타워조명 제작설치 : 조명폴(12m) 4본, 투광기(LED 280W) 24개

- 전력공급을 위한 배관배선공사 1식

- 조명타워제어반 1면

❍ 사 업 액 : 112,400천원

- 전기공사비 : 34,300천원

- 자  재  비 : 78,100천원

․ LED투광등 55,500천원, 조명폴 16,100천원, 조명제어반 6,500천원

Ⅲ		발주방법

❍ 전기공사 : 전자공개수의계약

❍ 자재구매

- LED조명, 조명폴 : 조달청 3자단가

- 조명제어반 : 제작업체와 수의계약

Ⅳ		예산조치

❍ 총 사업비는 112,400천원이나 확보예산은 90,840천원으로 예산 부족

- 부족예산액 : 21,560천원(112,400천원-90,840천원)

❍ 부족예산에 대해서는 『잠실야구장 감시제어설비 설치공사』 집행잔액을

사용하고자 함.

※ 사업비 집행 현황

(천원)

구 분	예 산 액	발주 또는 계약액	잔 액
풋살경기장 조성공사	330,000	239,160	90,840
잠실야구장 감시제어설비 설치공사	650,000	579,230	70,770

Ⅴ		추진일정

❍ 2014. 4월 : 공사 발주

❍ 2014. 5월 : 공사 계약 및 착공

❍ 2014. 6월 : 공사 준공

첨부 : 제2풋살경기장 조성 및 운영 계획 1부. 끝.