	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	폐기물처리용역 변경계약(제2회, 준공) 요청(도림교 확장)

우리부에서 시행 중인 『도림교 확장공사 건설폐기물처리용역』의 설계변경(제2회)에 대하여 변경계약을 요청합니다.

1. 용 역 명 : 도림교 확장공사 건설폐기물처리용역

2. 용 역 비 : 금29,951,000원

3. 용역기간 : 2012.12.14 ~ 2014. 4.30

4. 용역업체 : 광일에스앤에스(주) 정윤석,  광일토건환경(주) 박노일

5. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충, 도림교 확장(교통개선분담금), 시설비 및 부대비, 시설비(401-01) (2012년 사고이월비)

도로건설, 간선도로망확충, 도림교 확장(도시개발특별회계), 시설비 및 부대비, 시설비(401-01) (2014년 예산)

6. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
용 역 비	29,951,000	44,803,000	14,852,000	내역변경
용역기간	′12.12.14~′14. 4.30	′12.12.14~′14. 4.30	-

첨부 : 1. 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(전체2회 ) 1부.  끝.

	토목부장
주무관	정문수		광역도로과장	代조양연		토목부장	04/29 노우성
협조자	경리과장	최영미
시행	토목부-8246	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 2동3층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개