투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	시설공사 변경계약(전체3회, 준공) 요청(도림교 확장)

우리본부에서 시행 중인 『도림교 확장공사』의 설계변경(전체3회, 준공)에 따른 변경계약을 요청합니다.

1. 공 사 명 : 도림교 확장공사

2. 공사위치 : 구로구 신도림동330-7 ~ 영등포구 문래동30 (경인로)

3. 공사규모 : 도로확장 폭6차로 → 9차로, 연장84m

4. 공사기간 : 2012. 6. 8 ~ 2014. 4.30

5. 계 약 자 : 서남종합건설㈜ 윤용웅,  ㈜감천토건 문경식

6. 예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충, 도림교 확장(교통개선분담금), 시설비 및 부대비, 시설비(401-01) (2012년 사고이월비)

도로건설, 간선도로망확충, 도림교 확장(도시개발특별회계), 시설비 및 부대비, 시설비(401-01) (2014년 예산)

7. 설계변경 내역

구 분		당 초	변 경	증 / 감	비 고
공사비	합 계	3,691,538,720	3,763,493,720	71,955,000
	도급비	2,323,750,000	2,299,660,000	감)24,090,000	내역변경
	관급비	1,230,283,000	1,326,328,000	96,045,000	내역변경
	이전비	137,505,720	137,505,720	-
공 사 기 간		′12. 6. 8~′14. 4.30	′12. 6. 8~′14. 4.30	-

첨부 : 1. 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(전체3회) 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	정문수		광역도로과장	代조양연		토목부장	전결 04/29 노우성
협조자	계약1팀장	김점선
시행	토목부-8223	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길15 2동3층(서소문동)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2561	/전송	02-3708-2599	/	msjeong13@seoul.go.kr	/	대시민공개