투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(생물여과 공법기자재) 납품기한 연기 요청

1. 설비부-4370호(2013.04.26)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인『마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사』에대한 사용시기 미 도래로 인한 관급자재(생물여과 공법기자재) 연기요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

--- 아     래 ---

구 분	당 초 (납품기한)	변 경 (납품기한)	금 액(원)		비 고
생물여과 공법기자재 (상향류식여과장치)	2013. 06. 26 ~ 2014. 02. 28	2013. 06. 26 ~ 2016. 06. 30	당초	1,355,000,000	- RW-310포기용산기장치 - RW-M-311역세용 장치 - RW-M-312여과지제어반 - 부상여재 : 3~5mm
			변경	1,355,000,000

○ 사 유 : 사용시기 미 도래로 인한 납품기한 연기

○ 계약번호 : 12132145600(구매관리번호 : 12132170100)

첨부 : 조달청(물품계약서) 1부. 끝.

	방재시설부장
★주무관	김현기		환경시설과장	박희천		방재시설부장	04/29 박종웅
협조자	주무관	김상용
시행	방재시설부-2386	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문 별관 2동 2층	/
전화	3708-8785	/전송	3708-8756	/	hyun2000@seoul.go.kr	/	대시민공개