문서번호	주거환경과-3889
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주거환경관리팀장	주거환경과장
임동수		양준모	04/29 최성태
협조

방학동 두레주택

시설물 보완공사 설계변경 검토 보고

2014. 4

주택정책실

(주거환경과)

방학동 두레주택

시설물 보완공사 설계변경 검토 보고

방학동 두레주택 조성 시설물 보완공사와 관련하여 기 실정보고 사항, 공사 일부 변경 및 보험료 정산 반영에 따른 설계변경 검토 보고임

사업개요

공사 명	계약상대자	계약금액	계약기간	비고
방학동 두레주택 시설물 보완공사	㈜동네목수 박학용	9,479,100원	‘14. 3. 17 ~ ‘14. 4. 30

❍ 주요 공사내용

- 대형주택 : 방범창 및 난방 유량계 설치, 주방 조리대 추가, 세대별 시건장치 및 우편함 설치 등

- 소형주택 : 난방 유량계 설치, 세대별 시건장치 및 지하층 방범도어 설치 등

설계변경 사항

❍ 변경내용 : 기 실정보고 사항, 공사 내용 변경 및 보험료 정산 반영

❍ 계약금액 변경 : 9,479,100원 → 10,923,100원 (1,444천원 증)

- 세부내용

(단위 : 천원)

구분	위치	내용	공사비	비고
기 실정 보고 사항	대형 및 소형주택 지하	주민활용공간 환기 시설 설치(결로 방지)	450
	대형주택 지하	시건장치 및 우편물 수취함 설치	80
	대형주택	방충망 설치, 소화기 설치	510
	대형 및 소형	현관도어 내시경 및 도로명 주소판 설치	58
공사 내용 변경	대형주택 전체	유량계 설치 삭제	(-)1,495	입주자 요구사항
	대형주택 2층	전면 발코니 시선차단용 렉산 설치	(+)1,000
	대형주택 203호	세대간 방음시설 설치	(+)480
보험료 정산	연금보험료, 건강보험료, 노인장기요양보험료, 안전관리비		(-)209
제경비			570
총 계			1,444

검토 및 처리의견

❍ 기 실정보고 사항 반영(편의시설 및 지하층 환기시설 반영 등), 입주자 요구사항 반영 및 정산 대상인 보험료, 안전관리비 정산 사항으로,

❍ 특히, 입주자 요구사항은 셰어하우스형 임대주택에 대한 인근 등산객 및 주민들의 부정적인 시각에 따른 시선차단막 설치 및 생활소음 방지를 위한 방음시설 설치하는 사항임

❍ 변경된 내용을 반영하여 설계변경 처리코자 함

따로붙임 : 변경내역서 1부. 끝.