문서번호	토목부-8216
결재일자	2014.4.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
정문수		代조양연	전결 04/29 노우성
협조

폐기물처리용역 설계변경(제2회, 준공) 보고

(도림교 확장공사)

2014.  4.

서울특별시도시기반시설본부

( 토 목 부 )

폐기물처리용역 설계변경(제2회, 준공) 보고

(도림교 확장공사)

『도림교 확장공사』에서 추가 발생된 건설폐기물을 반영하여 설계변경을 실시하고자 보고하는 내용임.

※ 설계변경 현황 : 당초 : 29,951천원 → 변경 : 44,803천원 ((증)14,852천원)

□ 용역개요

◦ 용 역 명 : 도림교 확장공사 건설폐기물처리용역

◦ 용역기간 : ′12.12.14 ~ ′14. 4.30

◦ 용역금액 : 29,951천원

◦ 용역업체 : 광일에스앤에스(주) 정윤석,  광일토건환경(주) 박노일

□ 보고내용

◦ 본 공사시 추가 발생된 건설폐기물 등을 설계에 반영이 필요한 실정임.

- 설계 누락분 및 공사 중 추가 발생된 건설폐기물 수량 반영

□ 설계변경 내역 (전체2회)

◦ 용역비 및 용역기간

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
용 역 비	29,951,000	44,803,000	14,852,000	내역변경
용역기간	′12.12.14~′14. 4.30	′12.12.14~′14. 4.30	-

◦ 폐기물 수량 내역

(단위 : 톤)

공 종	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
콘크리트	950	1,370	420
아 스 콘	556	884	328
혼합폐기물	5	5	0

□ 조치계획

◦ 상기와 같이 본 공사에서 추가 발생된 건설폐기물 등을 반영 설계 변경하고,  정산처리 하고자 합니다.

첨부 : 1. 감리단 검토 의견서 1부.

2. 시설공사 설계변경 보고서 1부.

3. 설계변경 내역서(전체2회) 1부.  끝.