기  성  보  고  서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	서장원	황혁기	전결 04/29 이자원

명에 의하여 ‘13년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속) 기성금 신청(9차) 현황을 아래와 같이 보고합니다.

2014.   4.   29

보고자 : 지방 시설 주사   황 혁 기

지방시설주사보   서 장 원

강서수도사업소장 귀하

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 2013년 강서,양천,구로구 일대 긴급누수복구공사(장기계속공사)

나. 착 공 일 : 2013. 5. 13

다. 준공기한 : 2014. 6. 30

라. 도 급 액 : 2,480,874,700원

마. 도 급 자 : 삼융종합건설(주)  대표 : 백준호

2. 기성금 신청현황

가. 위       치 : 강서구 등촌동 634-15번지외 195건

나. 금회공사기간 : 2014. 3. 13 ~ 2014. 4. 11 (30일간)

다. 기 성 금 액 : 199,463,000원

라. 예산 과목 : 상수도사업비,영업비용,배급수비,기타교체비(85,624,000)-상수도관누수복구

상수도사업비,영업비용,배급수비,기타교체비(113,839,000)-불용관정비

3. 기성 내역

가. 기성내역                                                         (단위: 원)

구 분	계 약 금 액	전회까지 기성금액	금회 기성금액	기성 합계	잔 액
도 급 액	2,480,874,700	1,997,743,000	199,463,000	2,197,206,000	283.668,700

나. 누수복구개요

(단위:개소)

계	급수관	송･배수관	비 고(기타)
196	119	33	44

다. 세부내역

연번	구 경	공사개요(m)	급수관 연락공사(개소)	비 고
계	D=15~50mm	274	88
1	D=15mm	45	36
2	D=20mm	85	22
3	D=25mm	62	10
4	D=30mm	17	6
5	D=40mm	45	13
6	D=50mm	20	1

4. 처리 의견

○ 상기와 같이 2014년 긴급누수복구 기성(9차)을 시행코자 합니다.

따로붙임 : 1) 기성내역서 1부.

2) 누수복구대장 1부. 끝.