투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소동물관 외부 전시장 설명패널 제작 계약기간 연장

1. 서울대공원장 방침 동물기획과-6644(2013.12.2)호와 관련입니다.

2. 소동물관 외부전시장(너구리,오소리,담비,스라소니) 설명패널 제작 계약기간을 아래와 같이 연장하고자 합니다.

가. 사 업 명 : 소동물관 외부 전시장 설명패널 제작

나. 계약업체 : 스튜디어 합 대표 공태현(137-20-35056) Tel (032-272-9341)

(인천광역시 서구 완정로34번길 20)

다. 계약내용 : 너구리,오소리,담비,스라소니 동물 설명패널 제작(수의계약)

라. 계약금액 : 19,987,000원

마. 계약기한 연기

- 당초 기한 : 2014. 3. 28한

- 변경 기한 : 2014. 4. 20한

바. 사  유 : 소동물관 외부 전시장 조성공사 기간이 연장되어 전시물 제작
설치구조물(벽체도색, 전시창 설치) 완공이 2014. 4. 20 예정                              임에 따라 방사장공사와 연동하여 상기와 같이 계약 납품기한
을 연장하고자 함.

따로붙임 : 소동물관 외부 전시장 현황 1부. 끝.

주무관	김효준		동물기획과장	03/26 김태원
협조자	주무관	강경숙		주무관	김희준		총무과장	이경로
시행	동물기획과-2680	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장길 102	/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-500-7995	/		/	대시민공개