투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	소동물관 외부 전시장 설명패널 제작 계약 기한 연장 의뢰

1. 동물기획과-2680(2014.3.26.)호와 관련입니다.

2. 소동물관 외부 전시장 설명패널 제작 계약기한 연장을 아래와 같이 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 소동물관 외부 전시장 설명패널 제작

나. 공사위치 : 소동물관 외부 전시장

다. 공사내용 : 너구리,오소리,담비,스라소니 설명패널 제작 시공

라. 계약금액 : 금19,987,000원

마. 설계변경사항(준공기한 연기)

○ 공사기간

- 변 경 전 : 2013.12.18. ~ 2014.3.28

- 변 경 후 : 2013.12.18. ~ 2014.4.20

○ 계약금액 : 변동없음

○ 연기사유 : 전시물 설치 대상인 외부 방사장 공사 미완성(2014.4월말 준공예정)

바. 도 급 자 : 스투디오 합 공태현

붙임 : 계약기간 연장보고서 1부.  끝.

	동물기획과장
주무관	김효준		동물기획과장	03/28 代김보숙
협조자	주무관	강경숙
시행	동물기획과-2734	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장길 102	/	http://www.grandpark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-500-7995	/		/	대시민공개