문서번호	토목부-8367
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	터널건설과장	토목부장	시설국장
손준호	명경출	노우성	04/30 이광세
협 조
	주무관			기성호
	주무관			조양연
	주무관			이석우

『동부간선도로 횡단 강교가설 시공계획 적정성 검토를 위한』

안전전문가 현장점검 및 기술자문 계획

2014. 4

도시기반시설본부

(토  목  부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 ■
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『동부간선도로 횡단 강교가설 시공계획 적정성 검토를 위한』

안전전문가 현장점검 및 기술자문 계획

동부간선도로를 횡단 강교 가설공사에 앞서 장비 및 인력 투입등 시공계획이 적정하게 수립되었는지를 안전전문가의 현장 점검 및 기술 자문받아 가설공사기간동안 안전시공에 철저를 기하고자 함.

□ 공사개요

○ 위    치 : 성동구 응봉동 ~ 성수동 (응봉교)

○ 규    모

- 확     장 : 폭4차로 → 6차로, 연장 625m

- 성능개선 : DB 18 → DB 24

○ 사업기간 : 2008.10.20. ~ 2015.12.31.

○ 총사업비 : 78,536백만원 [도급비 : 45,595백만원]

○ 감 리 사 : (주)건화 외1      ○ 시 공 사 : 한신공영(주) 외1

□ 추진현황

○ '12.04. : 왕십리측 시점부 기존교량 2차로 철거완료

○ '13.11. : 시점부 왕십리방향 3개차로 개통

○ '14.02. : 성수방향 기존교량 철거완료

○ '14.03. : 교각11번 설치완료

○ '14.04.현재 : 강교 지조립 완료 및 시공계획서 보완 중

□ 기술자문 계획

○ 일  시 : 2014. 5. 7.(수) 15:00~

○ 장   소 : 응봉교 확장 및 성능개선공사 현장(강교 지조립 및 거치현장)

○ 주요 자문(점검) 내용 : 강교거치 및 크레인 양중계획 등 적정성 여부

- 양중장비 제원 성능검사

- 양중장비 거치 위치(설치지점 적정성, 지지력 및 장비회전각 등)

- 시공상세도 작성, 비치 및 현장직원 숙지도

- 장비 작업계획서 및 장비 비파괴검사 여부 확인

- 동부간선도로 교통통제 계획 등

○ 자문위원

- 도시기반시설본부 안전과 : 기성호(안전전문관)

- 안전 자문위원 : 이윤구(장비전문가), 이만호(교량전문가), 이종협(암사대교 현장소장)

□ 향후계획

○ 자문(점검)위원 현장점검 결과를 반영하여 시공계획서등을 보완 및 안전성 확보 후 강교 가설공사 착수

○ 공사 착수 예정일 : 2014. 5.12.(월).  끝.