문서번호	시설과-1518
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최지효	홍순철	변규열	04/30 이춘희
협 조
	공원운영과장		이상용
	시설팀장		백운도
	주무관		김흥창

보라매공원 시설물 정비공사 시행계획

2014. 4.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

보라매공원 시설물 정비공사 시행계획

❍ 사업 추진계획 수립 (보라매공원관리사무소-657, `14.2.7)

- 노후 및 위험시설을 정비함으로써 안전하고 쾌적한 공원환경 제공

❍ 제한경쟁(지역), 다수공급자계약 2단계경쟁으로 시행

※ 공사 : 지역제한경쟁, 관급자재 : 다수공급자계약(1억이상), 3자단가계약

Ⅰ		공 사 개 요

❍ 위    치 : 동작구 신대방동 여의대방로20길 33 보라매공원

❍ 총공사비 : 284백만원 (도급 139백만원, 관급 145백만원)

※ 예산과목 : 공원조성과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비및부대비, 시설비

❍ 공사기간 : 착공일로부터 60일간

❍ 공사내용

- 테니스장 바닥포장 교체 및 배수로 정비

- 와우산 및 북동산 토사유출사면 정비

- 잔디광장 트랙 보수 등

Ⅱ		추 진 경 위

❍ 2014. 1.23 ~ 2. 3	: 테니스장 정비관련 설문조사

❍ 2014. 2. 5 ~ 2. 7	: 기술용역타당성 심사

❍ 2014. 2. 7	: 사업추진계획 수립

❍ 2014. 2. ~ 4.	: 남문보행로 조정 협의

(市장애인자립지원과, 남부장애인복지관)

❍ 2014. 2.21 ~ 4.19	: 실시설계용역 시행 및 준공

❍ 2014. 4.24 ~ 4.28	: 자체설계심사

Ⅲ		시 행 계 획

입찰 및 구매방법

❍ 공사입찰방법 : 제한경쟁(지역)

- 입찰참가자격 : 조경시설물설치공사업

❍ 관급자재 구매방법

- 1억 이상 : 다수공급자계약 2단계경쟁

- 1억 미만 : 3자단가계약

업무담당(감독)자 지정

❍ 공사추진 및 관리의 효율을 위해 유지관리부서와 공사감독 병행

- 주감독 : 녹지8급 최지효

- 부감독 : 녹지8급 조영곤, 방호8급 허정

추진일정

❍ 2014. 5.	: 공사 발주 및 관급자재 구매요청

❍ 2014. 5. ~ 7. : 공사시행

❍ 2014. 7.	: 시설물 인수인계. 끝.