문서번호	정수시설과-625
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
이정원		박심근	04/30 오세영
협 조
	주무관			김동석
	주무관			이한경

설계변경 보고

(배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치공사)

2014. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 보고

(배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치공사)

배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치공사의 배관자재 규격(두께) 변경으로 설계변경 하여 공사에 만전을 기하고자 함.

□  사업개요

❍ 공 사 명 : 배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치공사

❍ 계약업체 : ㈜삼경기계설비 대표 황동하

❍ 계약일자 : 2014. 4. 7.

❍ 계약금액 : 금19,903,320원(금일천구백구십만삼천삼백이십원)

❍ 공사기간 : 2014. 4. 8. ∼ 2014. 5. 5.

❍ 공사개요

- 배출수처리장 급수배관(100A) 설치 : 146.2M

- 배출수처리장 탈수기동 배관 개량(32A ~ 100A) 개량 : 52.9M

- 터파기 및 되메우기, 콘크리트타설  1식

□ 설계변경 사항

❍ 스테인리스배관 두께 100A(3.5t→3.0t) : 162.3M

□ 변경내용

○ 주요 변경내역(순공사비)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
스테인리스배관 100A 두께(3.5t→3.0t)	9,208,151	8,348,009	감)870,142

○ 총괄 변경내역

구 분		계약금액 (A)	변경금액 (B)	증 ․ 감 (B-A)	비 고
총사업비		19,903,320	18,810,000	감)1,093,320
계약금액	공급가액	18,093,928	17,100,000	감)993,928
	부가세	1,809,392	1,710,000	감)99,392
	계	19,903,320	18,810,000	감)1,093,320

※ 변경설계내역서 : 별첨

□ 보고자 의견

❍ 상기와 같이 배출수처리장 탈수기동 급수배관 설치공사 시행중 발생한 배관 규격(두께) 변경에 대하여 설계변경 시행코자 합니다.

붙 임 : 1. 변경설계내역서 1부.

2. 배관자재 규격(두께)변경 검토 보고서 1부.  끝.