함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	국제빌딩주변 제1구역 사업구간 내 소방용수시설 이설계획 변경 알림

1. 관련문서

가. 현장지휘대-8715(2013.9.23.)호 「국제빌딩주변 제1구역 사업구간 내 소방용수시설 이설 계획」

나. 터세움 제2014-07(2014.4.30)호 「소화전 이설 연기요청」

2. 위와 관련, 우리 관내에서 시행중인 국제빌딩주변 제1구역 사업구간 내

소방용수시설 이설공사에 대한 기한 연기 요청 건이 접수되어 다음과 같이 연기하오니,

참고하시기 바랍니다.

가. 요청내용 : 이설공사 기한 연기

기존	변경	사유
2014년 4월 30일까지	2014년 7월 31일까지	현장사정 (배관공사 미완료)

나. 공사구역 내 이설대상 소방용수시설

연번	용수번호	용수구분	식구분	관할
1	1695	소화전	지하식	한강로
2	1693	소화전	지하식	한강로
3	1696	소화전	지하식	한강로
4	773	소화전	지상식	한강로
5	1379	소화전	지하식	한강로
6	1229	소화전	지하식	한강로

다. 비  고 : “이설공사 기한 연기”외에 1개소 위치변경(773호)

붙임 : 소방용수시설 이설 예정지 위치도 1부.  끝.

	현장지휘대장
수신자	한강로119안전센터장,이태원119안전센터장,후암119안전센터장,이촌119안전센터장,서빙고119안전센터장,구조대장
담당자	권택순		대응총괄팀장	김성준		현장지휘대장	전결 04/30 강동만
협조자
시행	현장지휘대-4466	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개