문서번호	토목부-8379
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목부장
박천용		04/30 노우성
협조

「서부트럭터미널앞 지하차도건설공사」

시점부 도로계획(측도변경) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014.04.

「서부트럭터미널앞 지하차도건설공사」

시점부 도로계획(측도변경) 검토 보고

『서부트럭터미널앞 지하차도건설공사』 책임감리원으로부터 시점부 도로계획(측도변경) 실정   보고가 있어 이에 대한 검토 보고임.

1		관련근거

❍ 서지(감) 제14-161(‘14.04.30.) : 실정보고 : 시점부 도로계획(측도변경) 검토 보고】

2		공사개요

❍ 공 사 명 :「서부트럭터미널앞 지하차도건설공사」

❍ 공사규모 : 도로구조개선 L=1.35Km

지하차도 L=1,075m(BOX 740m, U-TYPE 335m)

❍ 공사기간 : 2008.03.10 ∼ 2014.06.30

❍ 공 사 비 : 금820억원(공사비 772, 기타 48)

❍ 시 공 사 : 중앙건설(주)외 1개사

3		감리단 보고내용

❍ 시점부 도로계획(측도) 변경 추진

- 현 황

• 지하차도 시점부 및 U타입 부분의 원활한 교통처리를 위해 당초 왕복 6차선을 8차선으로 건설함에 따라 기존 측도(차도)가 일부 축소됨.(3~6.5m → 3~3.4m)

※ 남부순환로 : 폭 1차로, 연장 600m(신월지하차도 ~ 넘은들 공원, 양측)

• 시점부 측도 변경(차도 → 자전거도로, 띠녹지, 보도)에 따른 이해 관계 주민들의 민원발생으로 주민 및 유관기관 의견을 반영하여 도로계획 변경이 필요함

- 주민설명회 개최결과(2014. 3.26.)

• 장  소 : 양천구 신월6동 주민센터

• 참석자 : 도시기반시설본부 토목부 업무관계자 2

양천구청 업무관계자 6, 양천구 고덕철의원외 주민 40명

• 내  용 : 시점부 보도계획 설명[측도 변경(아스콘 →보도)]

• 주민의견

→ 기존 측도 변경(차도 → 보도, 띠녹지, 자전거도로) 적극 반대

※ 차량 진출입 불편, 불법 주정차증가, 주차공간 부족으로 주민들간의 불화, 도로점용료 신규 부과

→ 기존에 이용중인 측도를 폐쇄하고 이용자가 거의 없는 자전거 도로 설치는 인근 주민들에게 더 큰 불편 초래

→ 측도 폐쇄보다는 지하차도 연장(신월지하차도구간)을 추진하여 상부에 자전거도로 계획이 바람직함(도로계획과 : 타당성용역결과 경제성 없어 연장은 곤란)

※ 주민들의 측도 폐쇄 반대의견이 강경하여 공사시행 곤란 (강행시 집단민원 우려)

-  평면도 (현재)

-  평면도 (변경 안)

-  횡단면도 (현재, 변경 안)

구 분	협 의 의 견	조 치 계 획	비고
보도환경개선과	보도유효폭 준수, 횡단경사 준수	반 영
보행자전거과	자전거도로 단절불가, 유색포장원칙, 불가피할 경우 상충구간 적색 유색포장	자전거도로 단절 상충구간만 적색유색포장
물관리정책과	보도블럭재질 투수성포장, 빗물처리 시설설치	반 영
방재시설부 (조경시설과)	띠녹지설치 (1.0M 이상시 조성) 가로수 식재(보도폭 2.0M이상시 조성) 단차구간 조경블럭쌓기,상단 녹지경계석 제외	반 영
양천구청 (공원녹지과)	가로띠녹지 보도3.0M 이상시 설치 띠녹지 제외요망구간 ( 버스정류장 등 )	반 영

❍  유관기관 협의 의견 및 조치계획 ( 요약 )

❍ 검토의견

- 위에서 검토된 바와 같이 시점부의 측도는 주민의견 및 유관기관 의견을 반영하여 (차도 : 아스콘) 존치하되, 측도 존치로 확보가 불가능한 자전거도로는 제외하며 최소한의 보도와 띠녹지 설치로 민원을 해소하는 것이 적절한 것으로 사료됨.

- 이로 인해 증,감되는 공사비는 추후 실정보고후 설계에 반영하는 것이 타당하다고 사료됨.

4		조치 의견

❍ 감리단 검토의견과 같이 시점부의 측도(차도)는 존치하되, 측도 존치로 확보가 불가능한 자전거도로는 제외하며 최소한의 보도와 띠녹지 설치로 민원을 해소하여 공사 추진에 만전을 기하고자 하며, 이로 인해 증,감되는 공사비는 추후 감리단에서 실정보고후  설계변경 시  반영하고자 함.

붙 임  1) 감리원 실정보고 1부.

2) 유관기관 요구사항 조치계획 1부.

3) 도로계획 도면 1부.  끝.