다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	2013 행정포털 개선사업 주간보고 (21주)

2013 행정포털 개선사업의 21주차 추진실적을 보고 드리고자 합니다.

○ 추진기간 : 2014. 4. 28. ~ 5. 2.  (21 / 26주차)

○ 추 진 율 : 77% (계획 77%)

○ 추진실적

- 사업관리 : 77% (계획 77%)

· 산출물 보완 및 중간보고 자료 작성

· 추가 요청사항 처리 일정 및 데이터정비 방안 수립

- UX/UI 컨설팅, 인프라 구성 : 100%

- 시스템 개발 : 83% (계획 83%)

· 스토리보드 작성(관리자)

· 전체 퍼블리싱 및 UX전환, 메인화면 개인화, 게시판 : 완료

· 관리자 화면 디자인 및 퍼블리싱 진행

· 통합검색 : 수집데이터 테스트/정제 진행, 권한 및 카테고리 개발/테스트 진행,검색페이지 디자인 개발/테스트, Open-API 코드 개발

- 시험 및 운영 안정화 : 35% (계획 35%)

· 단위/통합 테스트 진행중

· 1차 성능테스트 준비 및 실행 (5/2~5/3)

붙임:  주간업무보고서(21주차) 1부.  끝.

주무관	김대원		프로젝트관리팀장	김기항		정보시스템담당관	04/30 임성우
협조자
시행	정보시스템담당관-5575	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 서소문동 시청별관 1동 3층 정보시스템담당관	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2986	/전송	02-2133-1071	/	doomsday@seoul.go.kr	/	대시민공개