투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	어린이대공원 놀이동산 재조성공사 설계변경(제4회) 시행(총차,3차)

1. 시설과-1519(2014.4.30)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 추진 중인 「어린이대공원 놀이동산 재조성공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경(4회) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 어린이대공원 놀이동산 재조성공사

나. 도 급 액 : 금2,495,591,600원(총차)

(1차 : 794,409,000원/ 2차 : 953,145,600원/ 3차 : 748,037,000원)

다. 공사기간 : 2012.12.20 ~ 2014. 4.30

라. 시 공 사 : 케이디종합건설(주) 대표 백승묵 등 3개사

마. 설계변경사유 : 현장여건으로 인한 추가공사 발생

바. 공사비 변경내역

구 분		도 급 비			비 고
		당 초	변 경	증 감
총차 공사		2,495,591,600	2,998,485,600	증502,894,000
도급비	계	2,495,591,600	2,998,485,600	증502,894,000
	1차 공사	794,409,000	794,409,000	-	준공(14.2.14)
	2차 공사	953,145,600	953,145,600	-	준공(14.2.14)
	3차 공사	748,037,000	1,250,931,000	증502,894,000

사. 예산과목 : 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발및만족도개선, 시책주요공원조성, 어린이대공원놀이동산재조성, 시설비및부대비, 시설비

붙임 1. 설계변경 검토 보고서 1부.

2. 변경설계서(총차,3차) 각 1부.(내역서 별도 첨부)

주무관	양지윤		시설팀장	홍순철		시설과장	변규열		동부공원녹지사업소장	04/30 이춘희
협조자	주무관	최종성		주무관	윤유환		주무관	김인선
공원운영과장	이상용
시행	시설과-1521	(		)	접수		(		)
우	156-010	서울 동작구 여의대방로 20길 33(신대방동 395)	/
전화	02-2181-1158	/전송	02-2181-1169	/	ideal2009@seoul.go.kr	/	대시민공개