보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	이승환	김기상	04/30 장시명

제 목 : 급수공사 연기 보고

============================================================

명에 의하여 관악구 봉천동 급수공사 업무수행 중 아래와 같은 사항으로 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	##############	철개인상	개량-102
2

▢ 보고 내용

○ 상기 작업지시에 의하여 급수공사 작업지시를 하였으나, 공사현장에 수요가 자재적재로 인해 공사기한 내 급수공사가 불가능하여 가능한 시기까지 부득이 준공기한을 연기하고자 함.

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
개량-102	’14.04.17 ~ ’14.04.30	’14.04.17 ~ ’14.05.12

붙임 : 급수공사 연기원 1부(별첨).  끝.