함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2013년 관악,금천구관내 상수도시설물, 소화전설치 및 보수공사)-최종

1. 우리사업소에서 시행중인 『2013년 관악,금천구관내 상수도시설물, 소화전설치 및 보수공사(장기계속단가계약)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행하고 아래와 같이 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2013년 관악, 금천구관내 상수도시설물, 소화전설치 및 보수공사(장기계속단가계약)

나. 계약상대자 : 크로스텍엔지니어링(주)  대표 조광치

다. 계약기간 : 2013.05.01~2014.04.30

라. 설계변경사유 : 시공물량 증감 및 신규공종 발생 등

마. 설계변경 금액내역                                      (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	929,149,920	908,445,000	감)20,704,920
도 급 비	769,149,920	748,445,000	감)20,704,920
관급자재비	160,000,000	160,000,000	-

따로붙임 : 설계변경 내역서 및 관련서류 각 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	강동길		급수운영과장	04/30 장시명
협조자
시행	급수운영과-9519	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동 470-11)급수운영과	/
전화	02)3146-4541	/전송	02-3146-4589	/	kdg44444@seoul.go.kr	/	대시민공개