투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서울특별시지방경찰청장(교통관리과장)
(경유)
제목	공사중 교통소통대책 기간 변경 알림-중랑교 보수보강공사

1. 서울지방경찰청 교통관리과-4756(2014.2.24), 시설보수과-1561(2014.

4.28), 교통운영과-7980(2014.4.29)호와 관련입니다.

2. 우리사업소에서 시행중인 ″중랑교 보수,보강공사″ 공사기간 변경에 따른 교통소통대책 기간 변경사항에 대하여 아래와 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 중랑교 보수,보강공사(2차)

나. 위    치 : 중랑교(동대문구 휘경동 9 ~ 중랑구 상봉동 474)

다. 공사기간 : 2014.03.05. ~ 2014.06.27

※ 교통통제를 수반하는 공사 : 2014.05.20까지

라. 교통소통대책 기간 변경

구 분	당 초	변 경	사 유
기 간	2014.3.3 ~ 4.27	2014.3.16 ~ 5.20	예산배정 및 홍보기간에 따른 착공일 변경 기상 및 현장여건 변경 등

※ 점용면적 변경 없음

따로붙임  1. 교통소통대책 기간 변경 관련공문 각 1부.

2. 위치도 1부.  끝

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	임승민		시설보수과장	04/30 박춘배
협조자
시행	시설보수과-1604	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	02-2210-1558	/전송	02-2210-1549	/		/	대시민공개