문서번호	기술심사담당관-7520
결재일자	2014.4.30.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제154호

				시 민
주무관	심사총괄팀장	기술심사담당관		행정2부시장
김태중	代김태중	최진선		04/30 김병하
협 조
	도시안전실장		조성일

외부전문가 기동점검단 점검결과 보고 (7주차)

2014.  4.

서울특별시

(기술심사담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

외부전문가 기동점검단 점검결과 보고(7주차)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 외부전문가 기동점검단의 7주차(2014.4.22.~4.26.) 활동결과에 대하여 보고 드림.

점검개요

2014. 4. 22(화)	2014. 4. 24(목)	2014. 4. 26(토)
서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업	망우본동 복합청사 신축공사
도시기반시설본부(도시철도토목부)	도시기반시설본부(방재시설부)	중랑구청(자치행정과)
’10.09.20 ~ ‘16.03.21(37.9%)	’12.11.15 ~ ‘15.02.02(13.6%)	’13.11.15 ~ ‘15.03.19(18.0%)
· 대정컨설턴트 박광준 · 한국건설기술연구원 황윤국 · 대진컨설턴트 정동순 (내부직원 : 기술관리팀 등 2)	· 한맥기술 박윤규 · 에스큐엔지니어링 송준민 · 진우엔지니어링 안삼현 (내부직원 : 토목심사팀 등 2)	· ㈜오푸스펄구조기술사사무소 이인영 · 아틀리에 기노채 · 행림종합건축 박태희 (내부직원 : 건축심사팀 등 2)

중점 점검사항

❍ 지하철 건설현장의 시공 및 안전관리실태 전반

- 터널내 중앙배수관 등 구조물 시공의 적정여부

- 콘크리트 구조물 시공이음부 치핑 및 철근 부착물 제거상태 등

❍ 분뇨 처리시설 증설 구간의 흙막이 가시설 시공 및 안전관리 전반

- 분뇨 처리시설 설치구간 지하터파기 흙막이 가시설 설치의 적정여부

- 터파기용 굴삭기 등 중장비의 안전관리 실태 등

❍ 건축물 신축을 위한 가시설 설치 및 철근 가공조립 전반

- 구조물 시공시 철근 배근 및 콘크리트 품질관리의 적정여부

- 흙막이 가시설 및 작업용 계단 등 근로자 안전관리 실태 등

점 검 결 과

	총 평
· 지하철과 같은 반복공종이 연속적으로 진행되는 현장에서는 안전 및 품질관리에 대한 기본적인 사항이 체계화되어 잘 지켜지고 있는 실정이나, · 건물 지하 터파기 공사 등과 같이 개별적인 공사에서는 개선하거나 보완하여야 할 사항이 지속적으로 지적되고 있음.

시정이 필요한 사항

공사명	계	안전관리	품질관리	환경·시민불편·기타
계	23	13	9	1
서울지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사	4	1	3	0
서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업	11	10	-	1
망우본동 복합청사 신축공사	8	2	6	-

분야별 주요내용

안전관리 분야

- 분뇨처리시설 증설구간 지하 터파기 가설 중앙파일 연직도 미확보

- 복합청사 건축물 가시설 상부에 복공판 적치로 낙하위험 상존 등

품질관리 분야

- 건축물 지하주차장 바닥슬라브 철근간력 부적정 배근

- 지하철 구조물 시공이음부 치핑방법 개선방안 강구 등

지적사항 조치

지적사항은 점검당일 시공업체 및 감리단에 전달하여 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 관리 및 현장 지도토록 공문으로 통보

현장별 주요 지적사례

1. 서남분뇨처리시설 증설 및 현대화 사업

· 위    치 : 강서구 양천로 서남물재생센터 내

· 사업개요 : 분뇨처리시설 4,000톤/일, 상부공원화

· 공사금액 : 63,470백만원

· 공사기간 : 2012.11.15. ~ 2015.02.2.(13.6%)

· 시공/감리 : 대림산업 / ㈜도화

· 추진공종 : 가시설 설치 및 지반보강공사

○ 지하 터파기 가설 중앙파일 연직도 미확보로 안전성 우려

⇒ 연직도 미확보된 중앙파일은 구조안전성 검토 후 보강조치 강구 필요

○ 버팀보 하부 작업공간 협소로 소형 굴착기 등의 충돌 우려

⇒ 가시설 하단부 작업공간 협소로 버팀보와 중장비의 충돌우려가 있으므로 작업반장 및 신호수를 배치하에 작업 진행 조치

○ 지하굴착 우각부 사보강 버팀보 구간 초기 계측자료 미확보

⇒ 하중계 초기 계측값 미확보 등 계측관리 불량구간은 조속한 시일내에 계측치를 확보하여 가시설의 변형여부 및 구조적 안정성의 지속관리 필요

2. 망우본동 복합청사 신축공사

· 위    치 : 망우본동 340-17

· 사업개요 : 지하2층, 지상6층/연면적 4,656㎡

· 공사금액 : 7,824백만원

· 공사기간 : 2013.11.15. ~ 2015.03.19.(18%)

· 시공/감리 : 라이드건설(주)/ ㈜전인CM

· 추진공종 : 지하층 골조공사

○ 지하2층 바닥슬라브 벽체부 이어치기면 치핑 미실시

⇒ 콘크리트 이어치기 면에 치핑을 실시하고 콘크리트 타설 전 청소 및 습윤상태 유지로 부착력이 확보될 수 있도록 조치

○ 지하2층 바닥슬라브 철근간격 부적정 배근(설계 150㎜ → 시공 30~50㎜)

⇒ 매트기초 바닥철근과 기둥철근의 겹침으로 조밀하게 배근됨에 따라 레미콘이 충진될 수 있는 공간 확보를 위한 철근간격 조정 조치

○ 지상1층 바닥 가시설 상부에 복공판 적치로 추락위험 상존

⇒ 가시설 상부에 불안정하게 세워서 적치해 놓은 복공판을 제거하여 작업장내 추락위험 요소 해소 조치

3. 지하철 9호선 3단계 923공구 건설공사

· 위    치 : 서울시 강동구 둔촌동 ~ 보훈병원 일원

· 사업개요 : 총 연장 1,728m (938정거장 1개소)

· 공사금액 : 107,721백만원

· 공사기간 : 2010.09.20. ~ 2016.03.21.(37.9%)

· 시공/감리 : 대림산업(주)/㈜동명기술공단

· 추진공종 : 토공 및 가시설, 구조물공

○ 지하철 구조물 시공이음부 치핑방법 개선방안 강구

⇒ 구조물 시공시 콘크리트 시공이음부에 핸드브레카를 사용한 치핑작업은 품질 및 능률면에서 불리하므로 워터젯트 이용 등 대안 강구 필요

○ 철근부착 콘크리트 페이스트 제거방법 개선방안 강구

⇒ 구조물 콘크리트 타설시 철근에 부착된 콘크리트 페이스트를 전동 브러쉬를 사용 제거하고 있으나 작업능률을 고려 콘크리트 굳기전 제거방안 강구 필요

○ 터널구간 중앙배수로 사석 채움구간 관리 철저

⇒ 터널 바닥 콘크리트 타설시 중앙배수관 사석채움 구간으로 콘크리트 페이스트가 스며들어 배수기능이 저하되는 일이 없도록 일정범위 비닐깔기 작업 선행 후 콘크리트 타설관리 필요

.  끝.