문서번호	역사문화재과-9668
결재일자	2014.5.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		문화재정책팀장	역사문화재과장
신철민		조완석	05/01 황요한
협조

『자원봉사를 활용한』

보신각터 유휴 공지 녹지대 조성 계획

2014. 04

역사문화재과

(문화재정책팀)

『자원봉사를 활용한』

보신각터 유휴 공지 녹지대 조성계획

자원봉사자를 활용하여 보신각터의 유휴 공지를 녹지대로 정비하여 효율적인 문화재 관리 및 관람여건을 개선하고자 함.

Ⅰ		보신각터 현황

□ 현    황 : 보신각터 총면적 2,881.7㎡(873평)

- 보신각(476.0㎡) : 목재(계단 및 2층바닥) 및 철근콘크리트조

- 관리사무소(72㎡) : 철근콘크리트 벽돌조(지상2층, 2012년 12월 건축/ 시민대기실 포함)

- 보신각 휀스 : 철재 및 목재 소재 휀스(길이: 210m/높이: 85cm)

□ 보신각터 내 유휴공지 현황

1구역(보신각 우측면)	2구역(보신각 좌측면)	3구역(보신각 후면)

□ 문제점

- 보신각터는 1일 평균 300여명(외국인 100명)이상 방문하는 지역으로 유휴공지가 약 630㎡ 존재함(1979년 보신각터 조성)

- 잔디식재 등 기타 초화류등은 일조건이 열악하여 식생이 어려움

- 매 년 보신각에서 실시하는 제야의 종 타종행사 실시에 따른 각종 시설물들 설치 등으로 기존 초화류 및 잔디류 고사됨

Ⅱ		추진개요

□ 위    치 : 서울시 종로구 종로 54 (관철동)

□ 사업규모

- 면   적 : 약 630㎡(보신각터 내 유휴 공지)

- 식재초종 : 맥문동, 원추리, 옥잠화 등

- 1~3구역으로 나누어 단계별 추진

□ 사업방식 : 기업체 후원을 통한 자원봉사로 사업 시행

□ 사업기간 : 2014. 6 . 1 ～ 2015. 6 . 30

□ 예산계획 : 기업체 후원을 통한 예산소요비용 없음

Ⅲ		소 요 예 산

□ 소요예산 : 18,900원(초본류 구매 시 면세품임)       (단위: 천원)

구분	식재면적(㎡)	식재초종(본)			소요예산(천원)	비고
		맥문동	원추리	옥잠화
합계	630	10,500	5,250	5,250	18,900
1구역	300	5,000	2,500	2,500	9,000
2구역	150	2,500	1,250	1,250	4,500
3구역	180	3,000	1,500	1,500	5,400

□ 식재초종 현황

초종	규격	식재밀도(본/㎡)	단가(원)	비고
맥문동	3~5분얼(10cm)	49	450
원추리	2~3분얼(8cm)	25	1,100
옥잠화	2~3분얼(8cm)	25	1,600

맥문동	원추리	옥잠화

Ⅳ		개 선 효 과

□ 기업체 후원으로 사업 진행 시 18,900,000원 예산절감 효과 발생

□ 유휴 공지 녹지대 조성으로 도심속 쾌적한 관람환경으로 개선

□ 비비추, 원추리, 옥잠화 등 재생능력이 탁월한 식재 사용으로

제야의종 타종행사 등 각종 행사 시 설치되는 시설물에 따른

식물 피해 최소화

Ⅳ		행 정 사 항

□ 기업체 후원으로 조성되는 사업으로 녹지대 조성시 기업체의 상호 등 표시

- 식물 화단의 안내표시(꽃말, 의미 등)판 하단에 간략하게 한 줄 표시

예) 이 화단은 ○○○기업체의 지원으로 조성하였습니다.

□ 후원한 기업체에서 요청 시 보신각상설타종행사 참여 협조.