토목․건축 시설물 유지보수공사(연간단가) 작업지시서

결재	주무관	정수시설과장
	김왕주	05/01 김구식

작업지시번호	영등포아리수정수센터 지시 2014 - 2차
작업지시일자	2014. 05. 01	감 독 자	김 왕 주 (인)
작 업 일 자	2014. 05. 02 ~ 2014. 05. 16(15일간)
시 공 사	건승엔지니어링(주) 대표 이안순

○ 작업내용

공 종	지시내용	수 량	비 고
- 수로관 설치	- 수로관 설치 (#2정수지 주변)	- 터파기 연장 58m - 수로관 부설 (300*300*2,000mm) 27본 스틸그레이팅 설치(400*995*44) 54m
- 샌드위치 패널 설치	- 샌드위치 패널 설치 (#2정수지 유출밸브실)	- 샌드위치 패널 설치 (t=100mm, EPS패널) 8.6㎡
- 방화문 설치	- 방화문 설치 (#1염소실 출입문)	- 방화문 설치(1.8m*2.1m) 2개소 번호키 설치 1개
- 변실 정비 (우수유입방지)	- 변실 정비 (#2착수정, 유량계실)	- 변실 정비 5개소 (벽돌쌓기 1.0B) 12.6㎡ 시멘트 액체 방수 29.5㎡ 외벽단열 3.5㎡
- 구조물 깨기	헐기 및 부수기 (#1약품탱크 지하)	헐기 및 부수기(7개소)1.7㎥ 몰탈바르기(벽체)8.7㎡ 몰탈바르기(바닥)4.2㎡ 폐기물 처리(1.7㎥, 3.9ton)
- 전동셧터 보수	- 전동셧터 보수 (#2송수 변전실)	전동겻터 보수 1개소
- 맨홀 뚜껑 설치	- 맨홀 뚜껑 설치 (#1약품투입실)	- 맨홀 뚜껑 설치(1m*1m, STS) 1개소

※ 작업지시서는 계약업체에 fax송부(02-382-6953)

끝.

2014. 05. 01.

영등포아리수정수센터장