문서번호	시설과-1307
결재일자	2017.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
박도원	代백강석	공헌구	김명용		03/10 송천헌
협 조
	동물원장			이기섭
	전략기획실장			윤대진
	총무과장			이행용
	동물기획과장			김보숙
	종보전연구실장			어경연
	동물복지1과장			이종혁
	동물복지2과장			송부용
	주무관			이춘한
	전문관			황인공

동물사 실내공기질 개선 추진계획

2017. 3월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

동물사 실내 공기질 개선 추진계획

동물원 내 건물별 공조설비와 환기설비 시스템을 개선하여, 관람장과 동물 내실 내 분진 및 냄새 제거로 관람환경, 근무환경을 개선코자 함.

1		사업개요

□ 사 업 명: 동물사 실내 공기질 개선사업

□ 사업기간: 2017. 1. ~ 2018. 12.(장기계속사업, 2년간)

□ 사업금액: 1,000백만원(‘17년 400백만원, ’18년 600백만원)

□ 사업내용

○ 공기조화기 설비 교체 및 공기순환기 신규 설치

○ 공조덕트 교체 및 개선공사

○ 급･배기 송풍기 및 환풍기 교체공사

2		2017년 추진계획

□ 예산금액: 400백만원

□ 공사기간: 2017. 3. ~ 6.

□ 대상건물: 대동물관 등 13개동

○ 대동물관, 곤충관, 열대조류관, 꼬마동물사, 종보전교육관, 맹수사, 곰사, 동양관, 제1아프리카관, 제2아프리카관, 제3아프리카관, 유인원관, 남미관

□ 사업 추진방향

○ 기존 공기조화기 및 송풍기 등 노후 설비 교체

○ 기존 벽부형 환풍기를 산업용 환풍기로 교체

○ 겨울철 난방손실을 줄이며, 신선 외기 도입을 위한 공기순환기 설치

□ 건물별 공사내용

연번	공사내용	대상건물 및 수량	비고
1	공기조화기 2대교체	열대조류관 내실용(냉‧난방겸용) 1대 대동물관 내실용 1대
2	공기순환기 17대 설치	동양관 좌･우 관람장(7대) 남미관 1층 출입구(2대) 제2아프리카관 관람장(4대) 유인원관 2층 원숭이쪽 복도(3대) 종보전교육관 홍보실(1대)
3	급･배기용 송풍기 29대 교체	대동물관(3대), 곤충관(1대), 꼬마동물사(1대), 종보전교육관(2대), 맹수사(3대), 곰사(2대), 동양관(1대), 제1아프리카관(3대), 제2아프리카관(2대), 제3아프리카관(3대), 유인원관 (8대)
4	산업용 배기팬 92대 교체	대동물관(4대), 열대조류관(26대), 꼬마동물사(23대), 종보전교육관(10대), 제3아프리카관(4대), 유인원관(21대), 남미관(4대)
5	덕트배관 교체	종보전교육관

공기조화기	공기순환기 설치계통도 및 제품사진	산업용 배기팬, 급･배기용 송풍기

3		예산 및 계약방법

□ 소요예산: 394백만원

□ 예산과목

○ 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능및야생동물종보전, 공원안전시설보수및정비, 시설비(동물사 실내공기질 개선, 400백만원)

□ 공종별 설계금액 및 계약방법

공 종 별		공사내용	설계금액	계약방법
기계	기계설비공사	▪송풍기 및 환풍기 설치, 덕트공사	126,946	공개입찰
	관급자재	▪공기조화기 2대 구매설치	156,823	조달청 물품구매
		▪전열교환기 17대 구매설치	58,406
	소 계		342,175
전기	전원공사	▪ 전열교환기 등 전원공사	52,360	공개입찰
	소 계		52,360
합 계			394,535

4		추진일정

□ 난방 설비인 공기조화기 가동 일정을 고려하여 공사일정 반영

□ 추진일정

○ 계약 및 물품구매 요청              : ‘17. 3월

○ 공사착공                           : ‘17. 4월

○ 공기조화기 및 공기순환기 제작 완료 : ‘17. 5월

○ 공사준공                           : ‘17. 6월