문서번호	시설과-1866
결재일자	2017.4.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	04/05 공헌구
협 조

해양관 기계설비 개보수공사 실정보고

2017. 4.

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

해양관 기계설비 개보수공사 실정보고

2016년 12월에 착공한 ‘해양관 기계설비 개보수공사’ 범위에 있는  기계실 바닥면이 매우 불량하므로 우선 개선 후 설계변경코자 함

1		공사개요

□ 공 사 명: 해양관 기계설비 개보수사업

□ 공사기간: ‘16. 12. 07. ~ ’17. 06. 09.

******************

□ 계 약 자: ㈜일승기계산업 대표 김병근

□ 공사내용

○ 기계실 여과탱크 1~2호기 및 해수 배관 교체

○ 사육사실 리모델링 기계설비공사(난방 및 위생설비)

○ 관리복도, 내실수조 내 급･배기 덕트와 송풍기 교체공사

□ 공정현황: 기계실 배관 및 탱크 철거 후 여과탱크 제작 준비 중

2		주요내용

□ 기계실 바닥면 에폭시 코팅 추가 시공 (추정금액 1백만원)

○ 공사내용: 바닥면 50㎡, 바탕면 조정 + 에폭시 코팅

○ 사유: 분진 발생 방지와 기계실 청결 유지로 안전사고 예방

(기존) 기계실 여과탱크 1～2호기 바닥면 사진	(변경) 에폭시 코팅 시공사진

3		추진계획 및 일정

□ 현재 추진 공정인 여과탱크 제작 설치 전에 기계실 바닥면 에폭시 코팅 시공

□ 계약상대자에게 선작업 지시 후 설계변경 추진

□ 추진일정

○ ‘17. 4.  5. ~ 4. 21.   에폭시 코팅 시공

○ ‘17. 4. 21. ~ 5. 31.  여과탱크 제작 설치

○ ‘17. 6.  1. ~ 6. 30.   여과탱크 주변 배관 시공.  끝.